문서번호	방재시설부-12170
결재일자	2019.8.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경시설과장	방재시설부장
박용도	代김달용	08/16 이임섭

『강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사』

가이식장 일부 수목 처리방안 검토 보고

2019. 8.

도시기반시설본부

방 재 시 설 부

『강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사』

가이식장 일부 수목 처리방안 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사』와 관련하여 가이식장 내 수목 처리방안을 검토 보고 드림.

- 근거: 동기강2019-254호(2019.8.9.)

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사

▢ 위    치 : 서초구 우면동~과천시 주암동~강남구(수서IC)

▢ 규    모 : 폭4~10차로, 연장 7.96Km,(교량 2개소, 지하차도 4개소)

▢ 공사기간 : 2002.7.3. ~ 2022.12.31.

▢ 사 업 비 : 3,617억원(조경 41억원)

▢ 감리사/도급사 : ㈜동명기술공단/롯데건설(주)

Ⅱ		건설사업기술자 검토내용

▢ 검토목적

❍ 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 기존수목은 수요처 정식 또는 가이식장 이식후  현장 재식재 토록 설계되었으나, 토목공정 공사기간 연장(당초 2014년 5월 변경     2024년 12월)으로 가이식장 토지소유주로 부터 수목철거 민원요청(2회)제기되어 8월말까지 조치토록 추진중이며, 장기간 가이식(6~7년)에 따른 수목 효용가치 저하   등으로 일부 수요처(서초구청) 이식후 잔여수목에 대한 처리방안을 검토코자 함.

▢ 관련근거

❍ 도시기반시설본부-19-6080(2019.05.30.)「가이식장 수목이식(서초구 요구수목)」

❍ 환경영향법 주요 질의회신집 q9.「수목이식계획 변경에 따른 협의대상」

▢ 검토내용

❍ 변경 사유

- 공사 준공기한 연장에 따른 가이식장 식재공간 협소로 수목상태 불량

(수형불량, 수피탈락, 식재 설계규격 부적정 등)

- 서초구청 최종식재 관련회의 결과 향후 신규식재 요청

- 가이식장 수목 364주중 61주에 대하여 서초구청 반입가능하고 나머지 수목 303주에 대한 수요처 없음

❍ 가이식장 위치도(성남시 심곡동)

❍ 가이식 현황 사진

가이식장 수목 전경	가이식장 수목 전경

❍ 잔여수목 처리방안 검토

구 분		규 격	단위	수 량		잔 여	처리방안
				가이식장	금회이식
상록교목	소나무 외	R12~40	주	78	41	37	수목제거
낙엽교목	은행나무 외	R10~48	주	286	20	266	수목제거
합 계			주	364	61	303

❍ 공사비 증감 현황

구 분	금 액(천원)			비고
	당초	변경	증․감
1. 조경공	-
교목제거	-	32,750	32,750
직접공사비	-	32,750	32,750
임목폐기물처리비	-	3,189	3,189
제 경 비	-	11,061	11,061
도 급 액	-	47,000	47,000

※ 추후 서초구청과 협의를 통하여 수목제거에 따른 신규식재 수종 및 규격을 결정할 계획이며, 기협의된 구룡지하차도 구간 수서방향 신규식재(느티나무 R18) 적용시 170백만원 추가 공사비가 발생됨.

□ 검 토 결 과

◦ 상기 내용과 같이 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 조경공사중 성남시 심곡동    가이식장 토지소유주 수목철거 요청에 따른 수요처 조회결과 364주 가이식 수목중    61주에 한하여 서초구청 수요처 이식후 잔여수목에 대한 처리가 필요한 실정임.

◦ 수요처 조회결과 별도의 수요처가 없으며, 우리현장 수목관리 주체 유관기관 서초     구청 공원녹지과 협의결과 신규식재를 요청하는 입장이며, 환경부 국토환경정책과     질의답변 내용을 고려하고 조속한 민원해결을 위하여 가이식장 잔여수목에 대하여     제거후 반출처리함이 타당할것으로 판단됨.

Ⅲ		보고자 의견

▢ 강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사 관련 성남구 수정구로 가이식한 수목에 대하여 토지소유주 토지임대 중지 요청에 따라 가이장내 수목에 대한 수요처를 조회하여 서초구에 수형 등 상태가 양호한 수목 61주에 대하여 이식 완료함.

▢ 수요 요청이 없는 수목(303주)은 처리방안에 대하여 건설사업관리기술자의 검토 의견이 타당하므로, 조속한 민원해결 등을 위하여 잔여수목에 대하여 제거후 반출처리토록 승인 처리하고, 추후 설계 변경에 정산·반영하도록 책임건설사업관리기술자에게 통보하고자 함.

붙임: 관련공문 1부. 끝.