문서번호	급수운영과-16745
결재일자	2019.8.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장
강영탁	08/16 유승효
협 조
	주무관		최용진

단 수 작 업 계 획 서

(쌍문동 712번지 일대_노후배관교체공사)

2019. 8.

북 부 수 도 사 업 소

급 수 운 영 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

단 수 작 업 계 획

(노후배급수관정비 및 분기작업 2019.08.19. ~ 2019.08.23.)

□ 공사현황

- 공 사 명 : 쌍문동 712-26 ~ 712-1 노후관 교체공사

- 공사개요 : D= 80mm~ 150mm, L=125m (노후관 교체공사)

- 시공회사 :*성 윤 개 발  현장대리인 나 기 섭

□ 지역별 단수계획

작업구간	단수위치	단수예정일	단수시간	단수세대	비고
쌍문동	*********	2019. 08.19 ~ 2019. 08.23	09:00 ~ 16:00	50세대

□ 공사배관 상세도

배관상세도	위치도

□ 단수소요시간

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	50분	1. 분기제수변(소프트) : 80㎜ 개 → 폐 (5분)
		2. 분기제수변(소프트) : 1500㎜ 개 → 폐 (5분)
		3. 분기제수변(소프트) : 200㎜ 개 → 폐 (5분)
		4. 분기제수변(소프트) : 80㎜ 개 → 폐 (5분)
		5. 분기제수변(소프트) : 200㎜ 개 → 폐 (5분)
		6. 분기제수변(소프트) : 200㎜ 개 → 폐 (5분)
		7. 분기제수변(소프트) : 80㎜ 개 → 폐 (5분)
		8. 분기제수변(소프트) : 150㎜ 개 → 폐 (5분)
퇴 수	20분	① 퇴수밸브(소화전) : 100㎜ 개 → 폐 (20분)
기존관절단	30분	① 기존관절단(쌍문동 712-26) : 150㎜×3개소 (30분)
배관	240분	① 관부설 및 이형관 접합 : 240분 - 관부설(D=150㎜×30m) : 180분 - 이형관부설(10개소) : 60분
세척 및 통수	20분	① 지하소화전(신설) : 100㎜ (20분)
합 계	6시간

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	타이튼직관	150	m	125
2	KP이음관	150	개	14
3	KP소켓곡관(B형)	150×45	개	6
4	플랜지관	150×650	개	1
5	KP소켓플랜지T형관(B형)	200×150	개	1
6	2F단관	150×500	개	1
7	제수변(다용도밸브)	150	개	1
9	이탈방지압륜	150	개	29
9	KP고무링	150	개	29
10	KP볼트	24×85	개	116

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호우	0.3W	대	2
2	관절단기	수동	대	2
3	양수기	50~100㎜	대	3

□ 인력확보계획

연번	구분	성명	자격	인원수	비고
계
1	용접공
2	배관공	*******	*****	**
3	특별인부	*******	****	**
4	보통인부	*******	*****	**

□  수계조정 및 퇴수작업계획

○ 수계조정 계획 : 해당없음

○ 퇴수작업 계획

- 퇴수잔량 산출 : 총퇴수량 83㎥(D=100㎜,150mm, L= 125m)

- 세척수량 산출 : 82㎥

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	감 독 자 : 직 시설7급 성 명 : ***** 감 리 자 : 이준엔지니어링 성 명 : *****	********* ************
업 체	회 사 명 : 성 윤 개 발 현장대리인 : ***** 대 표 자 : *****	*************

□ 시험굴착계획 : 해당없음

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

□ 기타사항

○ 단수일시 : 2019. 8. 19.(월)

○ 단수시간 : 09:00 ~ 16:00 (7시간)

○ 단수지역 : 도봉구 쌍문동 712, 31번지 일대

○ 단수세대 : 50세대

단수 및 통수시 변류 조절계획

□ 조절대상 및 담당자

〇 단  수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	*********	80 (분기)	1	이상없음	*******
	2	**********	80 (분기)	1	이상없음	*******
	3	***********	150 (분기)	1	이상없음	*******
	4	*********	200 (분기)	1	이상없음	*******
	5	*********	80 (분기)	1	이상없음	*******
	6	**********	200 (분기)	1	이상없음	*******
	7	**********	80 (분기)	1	이상없음	*******
	8	**********	200 (분기)	1	이상없음	*******
	9	*******	150 (분기)	1	이상없음	*******
	10
퇴수밸브	1	*********	다용도(신설)	1	이상없음	*******
퇴수밸브	2	**********	지하소화전	1	이상없음	*******

〇 통  수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	*********	80 (분기)	1	이상없음	*******
	2	**********	80 (분기)	1	이상없음	*******
	3	***********	150 (분기)	1	이상없음	*******
	4	*********	200 (분기)	1	이상없음	*******
	5	*********	80 (분기)	1	이상없음	*******
	6	**********	200 (분기)	1	이상없음	*******
	7	**********	80 (분기)	1	이상없음	*******
	8	**********	200 (분기)	1	이상없음	*******
	9	*******	150 (분기)	1	이상없음	*******
	10
퇴수밸브	1	*********	다용도(신설)	1	이상없음	*******
퇴수밸브	2	**********	지하소화전	1	이상없음	*******

밸브조절 위치도