문서번호	정수시설과-7689
결재일자	2019.8.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박진이		유영춘	08/16 가길현
협조
	주무관		이승우

2019년 지역지원(국비보조) 사업 태양광발전시설 설치 추진계획

2019년 지역지원(국비보조) 사업

태양광발전시설 설치 추진계획

2019. 08.

영등포아리수정수센터

(정 수 시 설 과)

2019년 지역지원(국비보조)사업

태양광발전시설 설치 추진계획

지역지원사업 국비로 정수센터 및 취수장 내 유휴부지에 태양광발전시설을

설치하여 동력비 절감 및 온실가스 배출량 감축에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2019년 상수도 신재생에너지 보급 지역지원사업 예정대상 알림

❍ 기전설비과-7697(2018.10.04)호

□ 2019년 공공시설 신재생에너지 보급사업(지역지원) 예산 재배정 및 교부

❍ 녹색에너지과-11586(2019.5.8.)호

Ⅱ		추 진 방 향

□ 설치지침 :신재생에너지설비의 지원 등에 관한지침(에너지관리공단)

태양광발전시설 설치 가이드라인(서울시 공고)

태양광발전설비 설치․관리업무 매뉴얼(서울시 지침)

□ 발전전력 자체사용을 통한 동력비 절감 및 온실가스 배출량 감축

□ 시설물 안전 및 발전효율 최대화를 고려한 설치

Ⅲ		추 진 개 요

□ 사 업 명 : 영등포아리수정수센터 태양광발전시설 설치

□ 설치장소 및 사업비용

장 소	설치용량 (kW)	국비(천원)	시비(천원)	총사업비 (천원)
계	220	263,340	321,860	585,200
1정수장 송수펌프동	29	34,713	42,427	77,140
병물동	52	62,244	76,076	138,320
2정수장 활성탄흡착지동	90	107,730	131,670	239,400
풍납취수장	49	58,653	71,687	130,340

□ 추진기간 : ′19.6월 ~ ′19.12월

□ 예산과목 : 에너지생산과 절약으로 원전하나줄이기, 신재생에너지보급,공공시설 신재생에너지보급 - 지역지원(시설비, 감리비)

Ⅳ		추진실적 및 계획

□ 설계용역 및 구조안전진단 : 전자공개수의계약(공동도급)

❍ 실시설계 : 전력기술관리법시행령 제27조에 의한 전문설계업1종         또는 종합설계업 등록업체

❍ 구조안전진단 : 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제28조에따른 안전진단 전문기관 등록 업체

❍ 계약금액 : 금26,501천원

❍ 용역기간 : ’19.07.15.~08.28. (45일)

□ 구매설치

❍ 조달우수제품구매 또는 일반경쟁입찰

- 예산 한도내에서 조달우수제품으로 구매

- 예산 부족시 일반경쟁입찰

❍ 사업기간 : 착공일로부터 60일

❍ 예 산 액 : 555,940천원(설계비 및 공사비 포함)

□ 전기공사

❍ 관련근거 : 전기공사업법 제11조(전기공사업법에 의한 전기공사 등록업체       ❍ 공사기간 : 착공일로부터 90일

❍ 공사금액 : 실시설계용역 결과에 따른 공사금액

□ 감리용역

❍ 관련근거 : 전력기술관리법 제12조(공사감리 등)

- 전력기술관리법 제14조제1항에 따라 전력시설물 전문감리업 또는 종합감리업을 등록한 업체

❍ 예 산 액 : 금29,260천원

□ 사용전 검사

❍ 관련근거 : 전기사업법 제63조(사용전 검사)

❍ 검사기관 : 한국전기안전공사 동부지사, 서부지사

Ⅴ		향 후 계 획

□ ′19. 6월 : 기술용역타당성 심사 완료

□ ′19. 7월 : 실시설계 용역 진행둥

□ ′19. 8월 : 중간보고회 및 최종보고회 개최

특정제품선정심사위원회 개최

□ ′19. 9월 : 계약심사 의뢰(계약심사과)

□ ′19. 9월 : 개발행위허가 요청(영등포구청, 송파구청)

□ ′19. 10월 : 계약 및 착공

□ ′19. 10월 ~ 12월 : 설치․준공 및 발전개시.끝.