투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(조명기구 구매 2건) 납품기한 연기 및 계약금액 변경요청(노들섬 특화공간 조성 전기공사)

1. 우리 본부에서 시행하는 “노들섬 특화공간 조성 전기공사”용 관급자재(조명기구 구매 2건)에 대하여 아래와 같이 납기 연기 및 계약금액 변경요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기 및 계약금액 변경요청 내용*********

품 명	계약번호 (납품요구)	계약자	구분	납품기한		비고
				당초	변경
조명기구	*********** **************	******	납기	**********	**********
			금액	**********	**********
조명기구	*********** **************	******	납기	**********	**********
			금액	**********	**********

나. 연기사유 : 건축 공정 연기(2019.10.20.)에 따른 관급자재 사용시기 미도래 및 건축 실변경에 따른 규격 변경으로 수량 감.

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 보고서 부.

2. 감리단 검토보고서 1부.

	설비부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	08/16 代여인웅
협조자	재무예산과장	代이강준
시행	설비부-12589	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8602	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)