문서번호	문화비축기지관리사무소-1856
결재일자	2019.8.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	공원관리팀장	문화비축기지관리사무소장	서부공원녹지사업소장
이호경	代이호경	서정화	08/19 남길순
협 조
	시민문화기획팀장		이지선

문화비축기지 “에코쉘터 설치” 추진계획

2019. 8.

서부공원녹지사업소

(문화비축기지 관리사무소)

문화비축기지 “에코쉘터 설치” 추진계획(안)

5기의 석유탱크를 재생하여 생태문화공원으로 조성한 문화비축기지 내 탱크와 문화마당 연계 공간에 건축가의 다양한 아이디어 실현을 통한 환경․생태문화․지속가능한 공간을 조성하고자 함

Ⅰ		추진배경(과정)

□ 추진근거

○ (가칭)서울문화비축기지 운영계획(시장방침 제367호, ’16.12.2.)

- 우리시 및 협치위원회를 통한 자립기반 마련 등

○ 협치위원회 ‘공간소위원회’ 제안 (’18. 12.)

- 문화마당 내 전시물 설치 시 시민편의 공간 필요

○ 서부공원녹지사업소장 주재 현안회의 시(’19.6.11.)

- 지속가능한 공간관리 필요

․ 문화마당 등에 공원 이용시민을 위한 그늘막 설치 필요

․ 푸드마켓 운영 등을 위한 수도시설 설치 및 설거지시스템 오수 처리

○ 협치위원회 ‘지속가능 공간 워킹그룹’ 2차 회의(’19.6.24.)

- 젊은 건축가 등 다양한 아이디어공모를 통한 설계 및 시공

○ 협치위원회 ‘전체회의’ 4차 회의(’19.7.24.)

- 아이디어 설계공모 공고 시 설계심사위원 명단 사전 공개

- 1단계 입상작 3개 작품 선정(상금 각 300만원)

- 2단계 당선작 설계·감리권 부여

II		추진계획

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 문화비축기지 내 ‘에코쉘터’ 설치

○ 사업기간 : 2019. 8. ~ 2020. 2.

○ 사업예산 : *********(설계·감리용역 및 공사비 포함)

○ 예산과목 : 문화비축기지 유지관리, 시설비(2018년 명시이월)

○ 추진방법

- 설계공모 : 2단계 설계공모(1단계 아이디어, 2단계 설계안)

※ 2단계 당선작 설계자와 설계 및 감리용역 수의계약

- 공사시행 : 일반공개경쟁입찰

- 공사감리 : 당선작 설계자와 수의계약

○ 추진체계

- 문화비축기지(총괄)

- 지속가능공간 워킹그룹(참여) : *********************

추 진 체 계

문화비축기지		협 치 위 원 회 (지속가능공간워킹그룹)		문화비축기지
추진안 설명		추진방향 및 방법 논의․결정		공모, 입찰 수행

○ 공간기능

- 연중 문화행사 추진을 감안하여 행사에 지장을 초래하지 않도록 조성

․쉼터 기능, 야외 프로그램 교육 운영, 시민편의 증진 등

- 문화비축기지 운영 철학(재생, 친환경, 생태), 공원 기능 등을 종합적으로 감안 디자인하며, 건축재료 및 소품 등도 선택

Ⅲ		공모 및 위원회 구성

□ 2단계 설계공모 및 설계용역

○ 공모명칭 : “문화비축기지 지속가능공간 디자인 프로젝트(SuSpace Design Project) 에코쉘터 설치 설계아이디어 공모”

○ 공모방식 : 2단계 설계공모(1개작 응모 시 재공모)

○ 공모조건 : 공모 당선작에 한해 설계·감리용역권(수의계약)

○ 참가자격 : 국내 건축사 (3명까지 공동이행 가능)

○ 공모기간 : 50일(1단계 20일 / 2단계 30일)

※ 아이디어(설계)심사 및 설계용역기간 : 별도

○ 공모내용

- 지속가능 공간 활용을 위해 기지 내 문화마당 경계부(첨부 도면 참고)에 쉼터 조성

- 문화마당의 지속적 활용방안과 함께 300㎡이내 쉘터공간 제안(예산범위 내)

- 주요기능：방문객을 위한 그늘막과 쉼터 제공, 야외 교육장으로 이용 가능

- 공모범위 : 첨부 설치위치 도면 참고(설계범위 지도 표기)

○ 시상내용

구 분	수 량	상 금
**************	*	*************************
*************	*	*********

※ 1단계 응모작은 3개 작품을 입상작으로 선정

2단계 3개 작품을  심사하여 당선작 1개 작품 선정

○ 제출서류

► 1단계 제출서류

․공모참여 신청서, 기타 서류

․설계설명서(A3, 4매, 표지포함) 7부.

: 설계의도, 설계도면(배치,평면,입면,단면도), 설계이미지(렌더링하지 않은 3D이미지)

► 2단계 제출물

․설계설명서(A3, 4매, 표지 포함) 7부.

: 개념, , 공간이미지, 개략공사비 내역, 구조 및 공법, 추진일정 포함

․패널 A1 1장, 스터디 모형(S:1/200)

※ 질의응답 : 문화비축기지 홈페이지에 공개

□ ‘설계공모 심사위원회’ 구성·운영 계획

○ 구    성 : 총 5명 이내

- 협치위, 건축, 문화예술 등 분야별 구성

분야	성 명	소 속
****	***	********
****	***	************
****	***	********
****	***	********
****	***	*********

○ 역    할 : 공모취지 및 실현 가능성 등을 심사하여 작품 선정

*******************  ※ 심사계획은 별도 수립

□ 설치공사 시행

○ 공사기간 : 착공일로부터 50일

○ 공 사 비 : ****************************

○ 시행방법 : 공개경쟁입찰에의한계약(일반입찰)

○ 입찰 참가자격

- 건설산업기본법 제8조에 의한 건축공사업 면허를 소지한 업체로 입찰공고일 현재 주된 영업소 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

Ⅳ		소요예산

○ 총액   ---------------  *********(2018년 명시이월 예산)

- 공사비 -------------- 약 **************************

- 설계 및 감리 용역비 약***************************************

- **** ------------------    *****************************

○ 예산과목 : 문화비축기지 유지관리, 시설비

Ⅴ		추진 일정

○ 설계공모 용역비 타당성 심사의뢰	8.20.

○ 설계 아이디어 공모 공고일	8.20.

○ 응모신청서 제출	8.20. ~ 8.26.

○ 1단계(20일 이상)

- 공모작 제출	9.18.

- 입상작 선정	9.20.예정

○ 2단계(30일 이상)

- 공모작 제출	10.23.

- 작품 선정	10.25.예정

○ 설계용역	10~11월

○ 시공업체 선정	12월중

○ 공사 완료	2020. 2월중

따로붙임 1. 에코쉘터 설치위치도 1부.

2. 설계·감리용역비산출서.

3. 설계지침서 및 과업내용서.

4. 2단계설계공모 공고문(안). 끝.