문서번호	시설보수과-7184
결재일자	2019.8.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김규춘		전결 08/19 박병연
협 조

『오금교보수공사』

“실정보고에 따른 검토결과 보고”

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8

강서도로사업소

시설보수과

『오금교보수공사』

“실정보고에 따른 검토결과 보고”

Ⅰ		공사현황

□ 공 사 명 : 오금교보수공사

□ 공사기간 : 2019. 4. 18 ~ 2019. 10. 14

□ 도 급 비 : 500,595,000원

□ 공사개요 : 표면처리 4,849㎡, 단면보수 6.3㎡, 기타 1식

□ 도 급 자 : 씨엘엠건설(주)  대표 윤종철

□ 공 종 율 : 65%

Ⅱ		보고내용

□ 관련문서

○ 현장실정 보고(구조건토 반영 외 2건)

- 서울시설공단 공사감독1처-4829(2019.8.14)

□ 실정보고 내용

1. 구조검토 비용 반영 건 --- “전동식 이동 렉 작업차”

○ 현황 및 문제점 : 공사감독1처-2721호(2019.5.28.)

- 착수전 설계도서 검토 당시 설계에 반영된 S3~S4 구간 이동식                렉작업차 사용에 있어 안전성 확보를 위한 구조검토 추가 비용 발생.

○ 검토내용

- 건설기술진흥법 시행령 101조의2(가설구조물의 구조물 안전성 확인)에             근거하여 전동식 이동 렉작업차 사전 구조검토를 실시하고, 그에 따른

구조검토비 설계에 반영.

2. 품질시험비 반영 건

○ 현황 및 문제점

- 설계에 반영된 반입 자재에 대하여 사전 품질 확보을 위한 품질시험 의뢰

비용 발생.

○ 검토결과

- 표면보수 반입자재에 대한 품질 확보을 위하여 공인인증기관으로하여금               시험 의뢰를 실시하고, 그에 따른 시험의뢰비 설계에 반영.

3. 고소작업차 사용 등 부대공 변경 건

○ 현황 및 문제점 : 공사감독1처-2721호(2019.5.28.)

- 작업구간 내 시민안전 및 원활한 공사 수행을 위한 보행안전도우미

추가 배치 필요.

- 부대공(고소작업차, 교통정리원, 싸인보드) 사용에 있어  실 작업 일수에              따른 수량 변경 필요.

○ 검토결과

- 교량 하부 작업구간 내 시민휴식공간, 체력단련기구, 소규모 공연장이                 존재함에 따라 이용시민 안전확보을 위한 보행안전도우미 추가 배치 반영

- 고소작업차, 싸인보드 사용 장비에 대한 실 작업 일수 반영.

공 종 명	규격	단위	당초수량	변경수량	증·감
고소작업차 사용	5ton	일	34	64	증) 30
교통정리원	주간	일	34	64	증) 30
싸인보드 사용	주간	일	34	64	증) 30
보행안전도우미	주간	일	-	30	증) 30

4. 개략공사비(제경비 포함) : 증)40,560천원

※ 실정보고 세부내역(#첨부)

Ⅲ		조치계획

□ 상기 보고내용과 같이 감독기관(서울시설공단)으로부터 제출된 실정보고

내용에 대하여 검토한바 적정한 것으로 판단되어 관련 내용을 감독기관에         통보(“승인”)하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임  서울시설공단 실정보고서  1부.  끝.