문서번호	설비부-12633
결재일자	2019.8.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	08/19 임정규
협조

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

2019. 08

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 공사 』와 관련 건설사업관리단으로부터 전기안전관리자 선임에 대한 실정보고 접수되어 검토보고 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선 전기공사

□  공사기간 : 2014.05.15. ~ 2019.12.31

□  위    치 : 종로구 창덕궁 돈화문 ~ 원남동 사거리(연장810m)

□  규    모 : 도로확장 4차로→6차로, 지하차도 320m

□  시 공 사 : *********

□ 공사금액 : ***********************************

□ 공 정 률 : 60%(전기)

2		관련근거

□ 율곡감 제2019-175호(`19.08.08): ‘전기안전관리자 선임’ 실정보고

3		실정보고 내용

□ 전기안전관리자 선임

○ 관련근거 : 전기사업법 제73조(전기안전관리자 선임 등)

- 자가용설비(75kw 이상) 전기 수전 시 전기안전관리자 선임하여야 함

□ 본 현장은 전기설비는 저압 80kw 이므로 전기안전관리자 선임 필요

○ 선임방법 : 전기사업법에 따른 ‘전기안전관리 대행사업자’에 의뢰하여 안전           관리업무 대행하며, 도급내역에 반영

○ 선임비용 : 月 94천원[시설물 인수인계 전까지(`20.02월 예상) 6개월 선임]

□ 건설사업관리자 의견

○ 본 전기설비는 전기안전관리자를 선임하여야 하는 대상으로 안전관리대행            사업자에 의뢰 시행하는 것의 적법성을 검토한바 적정한 것으로 사료됨.

4		보고자 의견

□  본 현장은 도심지 내에서 기존 도로 기능을 유지하면서 공사하고 있기        때문에 지하차도를 순차적으로(한방향 `19.9월 초, 양방향 `19.12월 말)         개통 예정이며, 전기시설물 기능유지를 위해 `19.8월 말 전기 수전         예정임.

□  전기안전관리자는 시설물 소유자가 전기사용전검사 이전에 선임        하여야 하나, 전기수전 후 인수인계까지 상당기간(6개월 예상) 소요        되므로 사업기간 동안 전기안전관리 대행사업자에게 대행하게 하고        인수인계 후 관리기관(북부도로사업소)에서 선임토록 하고자 함.

붙임 : 감리단 공문 1부. 끝.