문서번호	시설보수과-4586
결재일자	2019.8.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		임준빈	08/19 이성재
협조
	주무관		이석근

소화조 내부 보수공사 발주계획

2019. 08

중랑물재생센터

(시설보수과)

소화조 내부 보수공사 발주계획

소화조 내부 보수공사 계약심사 및 일상감사 결과과 통보되어 아래와 같이 발주 사업시행에 만전을 기하고자 함

1		추진경위

□ 2019.08.02. : 계약심사 결과 통보(계약심사과-13679호)

□ 2019.08.09. : 일상감사 의견서 송부(감사담당관-14229호)

2		사업개요

□ 사 업 명 : 소화조 내부 보수공사

□ 공사개요 : 단면복구 2,428㎡, 표면보수 7,604㎡

□ 위    치 : 제2처리장 소화조(5지, 10지), 제3처리장 소화조(C-2-1지, D-1-1 )

□ 공사기간 : 착수일로부터 2019.12.31.

□ 소요예산 : 2,284,485천원

3		용역발주 계획검토

□ 입찰방법 : 공개경쟁입찰(긴급)

□ 입찰참가자격

- 건설산업기본법에 의한 전문건설업 중 시설물유지관리업 면허를 보유한 업체

- 입찰공고일 전일부터 입찰참가신청 서류접수 마감일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 서울특별시에 주된 영업소를 둔 자를 구성원으로 하여야 한다.

- 주된 영업소의 소재지가 서울특별시 이외인 업체는 서울특별시에 소재한 시설물유지관리 업체와 공동도급협정서(구성원수 2인이내, 서울시 소재 업체의 참여비율은 49%이상, 대표자는 출자 비율이 많은 업체)를 체결하여야 함

- 단 서울시에 소재한 업체는 단독참여가 가능합니다.

※ 지방계약법시행령 제88조(공동계약)에 따라 지역의무공동도급 시 지역업체와 그 외 지역업체 간에는독점 규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 계열회사(상호출자 제한기업 집단 소속 계열회사를 말한다)가 아니어야 하며, 공동이행방식일 경우 구성원별 계약 참여 최소지분율은 5%이상이어야 함

- 본 공사는 『특허 제10********호(HWD공법), 특허 제10********호(RW-SYSTEM공법), 특허 제10********호(라파공법)』를 적용함

※ 본 입찰건과 관련하여 우리센터와 신기술(특허) 개발(보유)자가 신기술‧특허 사용협약을 체결하였으며, 입찰참가자는 기술사용료 등 기술사용 협약사항을 숙지하고 입찰에 참가하여야 하고 낙찰자는 계약체결전까지 당해 신기술(특허) 개발(보유)자와 사용협약을 체결하고 신기술‧특허 사용협약서를 제출하여야 함.

□ 하자기간 : 준공검사일로부터 HWD공법 3년, RW-SYSTEM공법 5년, 라파공법 5년

□ 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

4		향후 계획

□ 2019.08. : 발주의뢰(긴급)

□ 2019.09. : 계약 및 착공

□ 2019.12. : 공사준공

붙임  1. 위치도 1부.

2. 설계서 1부.

3. 일상감사 의견서 1부.  끝.