문서번호	설비부-12648
결재일자	2019.8.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
전상은		代백남진	08/19 임정규
협조

『돈화문 민요박물관 건립 전기공사』

관급자재 계약변경(납품수량 변경) 보고

2019. 8.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『돈화문 민요박물관 건립 전기공사』

관급자재 계약변경(납품수량 변경) 보고

우리 본부에서 시행 중인 『돈화문 민요박물관 건립 전기공사』와 관련하여, 관급자재(LED 실내조명등 14W 등 11종)의 계약변경(납품수량 변경) 사항이 발생하여 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ
		관 련 근 거

□ 건설사업관리단 혜원돈화 제2019-285(2019. 8.16.)

【관급자재(LED 실내조명등 14W 등 11종) 납품 수량 변경 검토】

Ⅱ
		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 돈화문 민요박물관 건립 전기공사

□ 공사위치 : 서울특별시 종로구 와룡동 5-9외 1

□ 공사금액 및 기간

차 수	계약금액(원)	준공금액(원)	계약기간	비 고
총 차	461,035,000	216,841,000	2018. 1.10. ~ 2019. 8.31.
제1차	216,841,000	216,841,000	2018. 1.10. ~ 2019. 4.30.	준 공
제2차	244,194,000		2019. 5. 1. ~ 2019. 8.31.

□ 계약업체 : ㈜이보건설

□ 감리업체 : ㈜혜원까치종합건축사사무소

Ⅲ
		관급자재 변경 사항

□ 변경사유 : 현장여건 고려에 따른 실내조명등 수량 조정

□ 변경내역

○ 납품요구번호(계약번호) : 12-18-1-27770-00(12162097812)

연번	물품식별 번호	품 명 (규격)	단 가	수 량			금 액(원)			비 고
				당 초	변 경	증․감	당 초	변 경	증․감
1	22173442	LED실내조명등 (MLLRI1400, 14W)	50,000	23	23	-	1,150,000	1,150,000	-
2	22867447	LED실내조명등 (MLSD1500, 15W)	50,000	9	13	증 4	450,000	650,000	증 200,000
3	23028388	LED실내조명등 (MLWC0810, 8W)	50,000	8	7	감 1	400,000	350,000	감 50,000
4	22867649	LED실내조명등 (MLLRI2100, 21W)	50,000	58	78	증 20	2,900,000	3,900,000	증1,000,000
5	22386536	LED실내조명등 (LRR4000, 40W)	125,000	18	18	-	2,250,000	2,250,000	-
6	22386541	LED실내조명등 (LPR4000, 40W)	135,000	7	7	-	945,000	945,000	-
7	22581871	LED실내조명등 (DLMR4000, 40W)	128,000	36	31	감 5	4,608,000	3,968,000	감 640,000
8	22386523	다운라이트설비 (SRDW, 10W)	60,000	29	28	감 1	1,740,000	1,680,000	감 60,000
9	22386527	다운라이트설비 (LMD1560, 15W)	62,000	139	138	감 1	8,618,000	8,556,000	감 62,000

○ 납품요구번호(계약번호) : 12-18-1-27771-00(12162212403)

연번	물품식별 번호	품 명 (규격)	단 가	수 량			금 액(원)			비 고
				당 초	변 경	증․감	당 초	변 경	증․감
1	23032724	경관조명 (SUN-RD-4, 12W)	500,000	6	6	-	3,000,000	3,000,000	-
2	23028918	경관조명 (SUN-SD-1, 12W)	260,000	13	11	감 2	3,380,000	2,860,000	감 520,000

Ⅲ
		감리단 기술검토 의견

□ 현장여건에 따른 관급자재(LED실내조명등 14W 등 11종)의 수량 변경으로

□ 수량 변경에 따른 계약 변경이 필요하다 사료됨.

Ⅳ
		보 고 자 의 견

□ 현장여건 등을 고려, 감리단의 관급자재 계약 변경(수량 변경)이 적정하다 판단되어,

□ 계약부서에 계약 변경 의뢰하고자 함.

붙임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.