문서번호	토목부-14839
결재일자	2019.8.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	08/20 代이동훈
협조
	주무관		황윤기

현장사무실 부지 복구(주차장 조성) 검토보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

2019.08.

도시기반시설본부

(토목부)

현장사무실 부지 복구(주차장 조성) 검토보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

공사 준공시기가 도래함에 따라 체육시설관리사업소와 협의하여 사용하고 있던 현장사무실 부지를 복구(주차장 조성)하고자 보고드림.

※ 관련근거 : 천호수 제2019-125호(2019.08.12.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 위    치 : 광진구 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역~광나루역)

○ 규    모 : 폭 6차로 → 10차로, 연장 900m(지하차도 580m 포함)

중앙버스전용차로 L=2,600m, 정거장 5개소

상징조형물 설치(높이 23.3m, 승강기 2대)

○ 사업기간 : 2010.10. ~ 2019.08.(준공기한 연기 예정)

○ 총사업비 : 1,095억원('19년 예산 3,500백만원)

Ⅱ		건설사업관리단 보고내용

○ 실정보고 사유

- 천호대로 확장공사 시행을 위하여 구의야구공원 부지 내에 설치한 현장사무실 부지의 원상복구(계획)에 대하여 체육시설관리사업소와 협의 사항(주차장 조성)을 보고드림.

○ 추진경위

- 10.10.20. 가설사무실 부지 사용 협조 요청(도기본→체육시설사업소)

· 구의야구장 주차장 출입구 녹지대에 현장 가설사무실 설치 협조 요청

- 10.10.29. 가설 사무실 부지 사용 협조에 따른 회신(체육시설사업소→도기본)

· 공사 완료 시 현장사무실 설치 장소를 공원으로 조성할 것

- 10.12.10. 현장사무실 설치 부지 원상 복구 계획 협의(도기본→체육시설사업소)

- 17.06.21. 천호대로 확장공사에 따른 구의야구공원 시설물 관련 협조 요청(체육시설사업소→도기본)

· 원상복구 관련 협의사항 변경(녹지대 원상복구→주차장 시설)

· 변경사유 : 주차시설 부족에 따른 야구장 이용고객 민원 해결

- 17.06.22. 실정보고 지시(도기본→감리단)

- 19.03.19. 주차장 신설계획(안) 회의

- 19.04.04. 현장사무실 부지 원상복구 관련 협조 요청(체육시설사업소→도기본)

· 출입구 확장, 계단 설치, 안전시설(스토퍼) 설치, 기존 주차장 재포장

○ 체육시설 관리사업소 요청사항

- 체육시설관리사업소 요구사항 검토

체육시설관리 사업소 요청사항	- 구의야구공원의 관람객이 증가함에 따라 주차시설이 부족하여 민원이 발생하고 있어 주차시설로 복구해줄 것을 요청. 기존 주차장도 노후함에 따라 재포장 요청

- 현장사무실 전경 사진

현장사무실 전경	현장사무실 전면	비고

○ 주차장 시설 계획

- 포장단면 및 측구 계획

포장 단면	측구	비고

· 포장단면은 기 설계된 단면을 적용하고, 배수계획에 따라 측구 설치

- 가드레일 및 메쉬휀스 검토

가드레일 설치 검토	비고
	주차장 차량 및 운전자 낙상사고를 방지하고자 설치

메쉬휀스 설치 검토	비고
	주차장 경계에 설치하여 주차장 미이용자 출입 제한

- 콘크리트 옹벽 블록 설치 검토

콘크리트 옹벽 블록 설치 검토	비고
- 현장사무실과 기존 주차장 단차로 인하여 옹벽 설치가 필요 관람객이 많이 찾는 야구장 주차장으로 빠른 시공 및 미관 고려 필요 옹벽에 따른 구조적 안정성 전문가(토질 및 기초 기술사) 검토 완료

○ 수량 증·감 검토

NO.	공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
■	가설사무실 원상복구(주차장 신설)
	********		**	*	**	**
	********		**	*	***	***
	***	**	**	*	*****	*****
	**	**	**	*	*****	*****
	****	*****	*	*	***	***
	***	*********	**	*	*	*
	********	**********	*	*	**	**
	*******		**	*	***	***
	******	******	**	*	*****	*****
	******	*****	**	*	*****	*****
	*****	************	*	*	***	***
	****	****	**	*	**	**
	****	************	**	*	**	**
	****	********	*	*	**	**
	****	********	*	*	**	**
	****		**	*	**	**
	********	**********	*	*	*	*

○ 단가적용

구 분	주 요 내 용	비 고
신규품목	**************************************************************************************** **************
기존품목	*****

○ 공사비 증감 내용                                  (단위 : 천원)

NO.	구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
■	가설사무실 원상복구(주차장 신설)
1.0	***	*	******	******
	*****	*	*****	*****
	***	*	***	***
	***	*	*****	*****
3.0	********	*	******	******
	*****	*	******	******
	*********	*	*****	*****
	*********	*	******	******
5.0	***	*	******	******
	****	*	*****	*****
	**********	*	*****	*****
	*****	*	*****	*****
6.0	*******	*	******	******
	****	*	***	***
	****	*	*****	*****
	****	*	*****	*****
	****	*	*****	*****
7.0	***	*	*****	*****
	********	*	***	***
	******	*	***	***
	****	*	*****	*****
■	*****	*	*******	*******
	*****	*	******	******
	*******	*	******	******
■	*******	*	*******	*******
	*****	*	******	******
	*****	*	*****	*****
■	*******	*	*******	*******	*

○ 감리단 종합검토의견

- 가설사무실 부지는 체육시설관리사업소에서 관리하고 있는 구의야구공원 안에 위치한 부지로 2010년 10월부터 무상 임대하여 사용하였으며,

- 야구장 관람객 증가 등으로 인한 주차 관련 불편 및 불법주차로 인한 상부도로 교통체증을 해소하고자 체육시설관리사업소의 요청사항을 반영하는 것은 타당한 것으로 사료됨.

Ⅳ		조치계획

○ 야구장 관람객 증가로 인한 주차장 부족 및 불법주차로 인한 상부도로 교통체증 해소를 위하여 체육시설관리사업소의 요청사항을 반영해야된다는 감리단의 검토의견이 타당한 것으로 판단되어 승인 조치하고 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

○ 사토 처리에 대해선 추후 사토장 선정 후 정산(경비 처리)하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토 의견서 1부.  끝.