문서번호	정수시설과-2825
결재일자	2019.8.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		백상희	08/20 서대훈
협조
	주무관		김수영

설계변경 시행 보고        (여과지동 내부바닥 정비공사)

“상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고마시는 아리수”

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8

강북아리수정수센터

정수시설과

설계변경 시행 보고

우리 센터에서 추진중에 있는 여과지동 내부바닥 정비공사 물량 감소 및 제경비 변경 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 시행하고자 함

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 여과지동 내부바닥 정비공사

○ 계약금액 :*************

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비

○ 계 약 자 :******************

○ 착 공 일 : 2019. 04. 22

○ 준공기한 : 2019. 09. 30

2		설계변경 시행

○ 변경금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비	***********	***********	************

○ 설계변경 내용 및 사유

- 수량(감) : 콘테이너형 가설사무실 및 창고

․콘테이너 가설사무실 및 창고를 미설치하여 감액처리

- 건강,연금,노인장기요양보험료 정산 시행

․계약자가 보험료 미납으로 납부자료 미제출

○ 물량 감소

공 종	물 량		증·감	사 유
	당초	변경
콘테이너 가설사무실	1	0	감	물량감소 - 콘테이너 미설치
콘테이너 가설창고	1	0	감	물량감소 - 콘테이너 미설치

○ 제경비 변경 사항

공 종	금 액		감	사 유
	당초	변경
건강보험료	*********	*	**********	증빙서류 미제출
연금보험료	*********	*	**********	증빙서류 미제출
노인장기요양보험료	*******	*	********	증빙서류 미제출
산업안전보건관리비	*********	*********	**********	안전관리 사용액 감소
일반관리비	**********	**********	********	공사원가 감소

3		조치 계획

□ 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의 후 설계변경 시행

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부

2. 산재·고용 완납증명서 1부

3. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부

4. 계약금액 조정 검증확인서 1부.  끝.