문서번호	투자창업과-8862
결재일자	2019.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	창업기반조성팀장	투자창업과장
노은영	백명숙	08/21 최판규

2019년 서울창업카페 신정점 조성 인테리어공사 설계변경 보고

2019. 8

경제정책실

(투자창업과)

2019년 서울창업카페 신정점 조성 인테리어공사 설계변경 보고

서울창업카페 신정점 조성 인테리어공사와 관련 현장여건 변경에 따른 신규공종 추가 및 시공물량 변경으로 설계 변경하고자 함

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2019년 서울창업카페 신정점 조성 인테리어공사

○ 위치/규모 : 양천구 신정동 1320-8 (지하1층) /273㎡

○ 계약금액 : 금117,303,300원 (계약체결일 : ’19. 07. 3.)

○ 계 약 자 : ㈜이노폼 대표 주해석

○ 계약기간 : 2019. 07. 3.~2019. 08. 21.

○ 공사내용 : 철거, 교체, 가설, 가구공사 및 냉방기기 설치 등 설비·배관공사

□ 정산내역

○ 설계금액 조정

구분		공사금액	증·감금액		증·감 사유
도급비 (준공금액)	당 초	117,303,300	증*	3,386,430	제작가구 설치 및 냉난방기 시공구간 증가 등 신규물량 추가 발생
	****	************

○ 주요 설계변경 사유

- 냉방기기 실외기 설치 변경에 따른 시공구간 증가 및 증액

- 천정, 바닥 공사구간 변경(회의실, 운영사무실 추가) 및 현장여건에 따른 마감재 변경 등

- 제작가구 추가 설치 및 설계누락 신규공종 발생 등

- 건강보험료, 연금보험료, 요양보험료 등 제경비 감소 발생분 반영 등

□ 향후계획

○ ’19.08.21 : 설계변경 계약 의뢰

○ ’19.08.21 : 공사준공

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 변경계약 합의각서 1부.  끝.