의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-14915
결재일자	2019.8.20.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),총무부장

주무관		토목설계과장	토목부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
배원영		김동현	代이동훈	김승원	08/20 한제현
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1532번, 전현희 의원, 환경노동위원회)

1. 국회의원 요구자료를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

전현희 의원(환경노동위원회, 더불어민주당)

[요구번호 1532번]

1. 서울 강남구 헌릉로 확장과 관련된 사업내용 및 설계용역 자료

(사업명, 구간, 총사업비, 총연장, 도로규모, 공사기간,시공사,사업이후 교통정체 해소 기여효과 등)

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 헌릉로 확장 기본 및 실시설계(용역)

○ 구    간 : 서초구 내곡동 내곡IC ~ 강남구 세곡동 헌릉IC(별첨위치 참조)

○ 총사업비 : 282억원(설계비8억, 공사비191억, 감리비10억, 보상비73억)

※ 현재 설계용역 중으로 설계결과에 따라 총사업비 변동될 수 있음

○ 총 연 장 : 도로확장 L=1.3km (서초구간:1.13km, 강남구간 0.17km)

○ 도로규모 : 왕복 6차로→10차로, 설계속도 60km/h

○ 공사기간 : 2020. 4 ~ 2022. 12

○ 시 공 사 : 현재 설계용역중으로 용역완료후 시공사 선정(2020.2 공사발주예정)

○ 기대효과 : 도로확장으로 인해 SRT 수서역 및 위례신도시, 강남세곡2 보금자리 등 헌릉로 주변 지역 대규모 개발에 따른 상습 정체구간 해소기대

▢ 추진현황 및 향후계획

○ '19.03. : 설계용역 착수

○ '19.05. : 착수보고

○ '19.08. : 노선선정 자문회의

○ '19.09. : 유관기관협의 및 주민설명회 예정

○ '19.10. : 설계심의 및 설계VE 예정

○ '19.12. : 설계용역 준공 예정

○ '20.02.~ : 공사발주 및 착공 예정

첨 부 : 사업위치도 1부 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반 시설본부 (토 목 부)	담당사무관	김 동 현
	☎3708-2587	주무관	배 원 영
	작 성 일 : 2019.08.