문서번호	도로보수과-8217
결재일자	2019.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
류승휘		강종훈	08/21 이학구
협 조
	주무관			이상하

2019년 교통사고 잦은구간 도로개선사업

시행계획 보고(응암로)

2019.  08. 20.(화)

서부도로사업소

(도로보수과)

2019년 교통사고 잦은구간 도로개선사업

시행계획 보고(응암로)

은평구 응암로 응암시장~서부병원 교차로 간 무단횡단 및 불법 좌회전으로 인한 교통사고 예방을 위한 차로재조정 후 중앙분리대 설치로 교통안전을 확보하고자 도로개선사업을 시행코자 함.

□ 관련근거

○ 2019년도 도로부속시설물 예산 재배정(교부) 알림(2차)

- 도로관리과-998(2019.01.18.) 예산배정액 : 240,000천원

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2019년 교통사고 잦은구간 도로개선사업(응암로)

○ 총사업비 : 95,726천원

○ 사업위치 : 은평구 응암로 응암시장~서부병원 교차로 간

○ 개선내용

- 차선분리대 설치, 중앙선 확폭을 위한 차로재조정

○ 사업구간 위치도(응암로)

□ 공사내용

○ 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 : 19,226천원(관급자재 포함)

- 노면표시 도색 및 제거 : 3,552m

□ 조치계획

○ 긴급을 요하는 공사로서 도로개선공사 발주 시 업체 선정까지 기간소요 등으로 별도 발주시행은 곤란하여, 진행중인 2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)에 포함하여 시행코자 함.

- 노면표시 : 약 17,323천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

○ 관급자재 사용검토

- 관급자재 구매는 자재선정위원회를 개최 후 구매 예정.

- 차선분리대는 조달구매로 설치완료하고 납품결과에 따라 정산.

- 노면표시 도색공사에 사용되는 특수페인트는 2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사의 납품 계약된 수량(증) 사용 및 정산.

○ 사업비 집행 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	예산 배정액	노면표시		차선분리대	집행잔액
		도급비	관급비
도로부속시설물 일상유지관리	240,000	17,323	1,903	76,500	144,273

○ 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로부속시설물 일상유지관리, 시설비(자치단체보조)

□ 향후 추진계획

○ 2019. 08. 20. : 개선사업 작업지시.

○ 2019. 08. 22. : 관급자재(차선분리대) 자재심의위원회 개최.

○ 2019. 10. 20. : 차로재조정 및 차선분리대 설치공사 완료.

○ 2019. 10. 30. : 개선사업 결과보고.

붙 임   설계내역서 각 1부.

개선사업 실시 설계 도면 1부.

관련 문서 1부.  끝.