문서번호	토목부-15021
결재일자	2019.8.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	08/22 代이동훈
협조

공사시행을 위한 회의 결과 보고

(창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

도시기반시설본부

(토   목   부)

창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업

공사시행을 위한 회의 결과 보고

구청 요청에 의하여 중단된 『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업』과 관련 공사 시행을 위한 관계자 회의결과 보고임.

Ⅰ

사업개요

○ 사 업 명 : 창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업

○ 위    치 : 돈화문로 외 5개차로

○ 규    모 : 가로개선(연장 2,400m, 폭1.5 ~ 22m)

○ 기    간 : ’18.12.26. ~ ’19.12.31.(착공일로부터 371일)

○ 사 업 비 : 13,558백만원(도급비 6,725백만원)

Ⅱ

추진경위

○ ’18.11.30 : 공사발주(토목+조경)

○ ’18.12.19 : 공사 계약체결

○ ’19.05.10 : 공사이관 요청(구청장→역도과)

○ ’19.05.15 : 공사중단(업무지시, 낙원상가 하부구간 포함)

○ ’19.06.18 : 개선(안)에 대한 자체검토 결과 알림(구청→도기본)

○ ’19.06.20 : 구청요구 내용 알림(구청→역도과)

○ ’19.06.24 : 공사이행을 위한 합동회의(역도과)

○ ’19.07.23 : 공사 재개를 위한 합동회의(구청)

- 시(역도과)에서 구청 요구사항을 반영한 보완설계 시행

○ ’19.08.08 : 낙원상가, 낙원아파트 대표 주민설명회 실시

- 포장깨기 공법변경 및 깨기물량 축소로 소음민원 해소, 주민들 신속 공사 재개 요청

○ ’19.08.19 : 낙원상가 공사 재개

○ ’19.08.20 : 보완 설계도서 검토 실무회의(역도과)

Ⅲ

회의결과

○ 일  시 : ’19. 8. 20.(화) 17:00 ~ 18:00

○ 장  소 : 도시기반시설본부 토목부 설계실

○ 참석자

- 서울시 : 역사도심재생과 팀장, 담당 주무관

- 본  부 : 광역도로과장, 담당 주무관, 감리단장, 현장소장

- 구  청 : 재생사업팀장, 주거재생과 담당주무관, 도로관리팀장, 교통행정과 담당주무관

○ 주요내용

- 구청 요구사항을 반영한 보완 설계도서 검토(설계용역사 수정 - 역도과)

▸차도부 돌포장 구간 차선도색 시공공법 변경(융착식 도료 ⇒ 수용성 도료)

▸기존 맨홀뚜껑 재사용이 어려움으로 돈화문로, 서순라길의 맨홀교체(디자인 맨홀로 교체) 필요

▸자전거도로 종점부(율곡로 쪽) 보도상의 자전거도로 연장 시공 필요

▸제시한 수목보호대(엘브엣지 고정방식)는 하자 우려가 있으니 수목보호대 변경 검토

- 구청 추가 요구사항 검토 요청(설계용역사 반영 가능여부 검토 후 통보 - 역도과)

▸차도부 석재포장 구간의 L형 측구(콘크리트)를 판석으로 변경(기 반영), 아스콘 포장 구간의 L형 측구를 PC형 측구로 변경(시공성 및 하자 문제로 적용 불가)

▸자전거도로 경계석을 모굴림 및 버너 마감재로 시공, 이면도로 진입부 횡단보도(3개소)를 고원식 석재포장으로 변경

▸돈화문로 종점부(포장계획도 6구간) 구간 띠녹지 조성, 차량정체 해소를 위한 차선 추가(1개 → 2개 차선) 확보 요청

- 보, 차도 단차 축소(무단차~5cm)에 따른 보행자 및 자전거도로 안전확보 방안 강구

▸ 돌방석,교통안전시설 시설 등에 대하여 구청에서 시행토록조치(준공과 동시)

▸ 역도과에서 필요예산 구청에 재배정(안전성 및 유지관리용이)

- 중앙선 파선 도색, 신호등 철거를 위한 교통규제심의 조속 완료(구청)

- 구청 요구사항 반영으로 공사비 증액이 불가피하므로 예산 규모에 맞게 사업구간 조정 필요

- 보완 설계도서(도면, 내역) 조속마무리 제출(역도과)

- 보완 설계 및 구청과 협의된구간 공사재개(공기지연해소)

Ⅳ

행정사항

○ 건설사업관리단 및 시공사에 일부구간 공사재개 업무지시

○ 보완 설계도서(도면, 내역서)가 확정 제출(역도과)후 설계변경 실시.  끝.