보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이현우	서규석	08/22 이성환

제 목 : 급수공사 추가 고지 발생 보고(신림동 1569-**)

=============================================================명에 의하여 관악구 급수공사 업무수행중 급수공사비 추가 고지 사항이 발생되어 아래와 같이 보고드림

□ 현 황

○ 공 사 명: 2019년 대학동외 10개동 상수도공사

○ 신 청 인: ****

○ 공사위치: 서울시 *****************

○ 공사개요: 임시급수설비(50mm)

○ 급수공사 승인: 급수운영과-15560

□ 보고내용

○ 임시급수설비 공사비 산출시 폐전 처리비용까지 포함해야 했으나 담당자의 착오로 인해 산출되지 않아 추가고지를 하고자 합니다.

○ 추가공사비: **********************

※ 정액공사비 산출 폐전 처리비용 산출로 인한 추가공사비 발생:

(단위:㎡, 원)

구 분	당초	변경	차이	비고
폐전 처리비용	-	469,900	469,900
정액공사비	1,236,400	1,706,000	469,900
원인자부담금	-	-	-
계	1,236,400	1,706,000	469,900

□ 조치계획

○ 상기의 급수공사비를 요금과에 추가고지 요청코자 합니다.

붙임  1. 급수공사비 산출내역(당초, 변경) 각 1부.

2. 실공사비 내역서 1부.  끝.