투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경(제1회) 계약의뢰-2019년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수공사

1. 시설보수과-7329(‘19.8.21)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『2019년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지 보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회) 계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2019년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수공사

나. 공사기간 : 2019. 3. 19 ~ 2019. 12. 31.

다. 계 약 자 : 대통건업㈜ 대표 육창길

라. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증·감
총공사비		942,039,000	1,082,000,000	증) 139,961,000
도급비	공 급 가 액	781,718,182	860,228,182	증) 78,510,000
	부가가치세	78,171,818	86,022,818	증) 7,851,000
	계	859,890,000	946,251,000	증) 86,361,000
관급자재비		59,500,000	113,100,000	증) 53,600,000
이전비및기타		22,649,000	22,649,000	0

붙임 : 1. 설계변경(1회) 시행품의서 1부.

2. 설계변경(1회) 관련자료 1식.  끝.

								시설보수과장
주무관							김종성				시설보수과장					08/22 신동헌
협조자
시행			시설보수과-7367										(						)		접수												(						)
우	03918					마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과																/
전화		02-300-8372							/전송			02-300-8384					/	jsung@seoul.go.kr													/	부분공개(5)