문서번호	기반시설과-2611
결재일자	2019.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
나병윤		라철흠	08/23 전영주
협 조
	총무과장			한정훈
	기획예산과장			문영일
	주무관			김경화

『2019년 한강공원 진출입시설 유지보수공사(연간단가)』

보수물량 증가에 따른 낙찰차액 사용 검토보고

2019.08.

시  설  부

(기반시설과)

『2019년 한강공원 진출입시설 유지보수공사(연간단가)』

보수물량 증가에 따른 낙찰차액 사용 검토보고

『한강공원 진출입시설 유지보수공사』추진중 시설물 노후화로 시민이용불편으로 민원처리에 따른 예산이 부족하여 낙찰잔액 사용하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 한강공원 진출입시설 유지보수공사(연간단가)

○ 공사내용 : 한강공원 진출입시설 정비 및 보수작업

- 보행육교 13개소, 교량접속 경사로 11개소, 교량접속 계단 23개소

○ 도 급 비 : 304,068천원, (집행잔액 45,932천원)

○ 공사기간 : 2019. 4. 1. ~ 2019. 11. 30.

○ 도 급 자 : ㈜민정토건 대표 백승언

○ 작업지시근거

－ 한강공원 진·출입 시설물 전수조사 및 안전점검 결과보고(기반시설과-933호, 2019.4.9.)

－ 2019년 한강공원 진출입시설 유지보수공사 작업지시(7회차)

○ 예산집행현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산편성액	원인행위액	집행(낙찰)잔액	비고
합 계	350,000	304,068	45,932
접근시설	300,000	254,068	45,932
기전시설	50,000	50,000	-

Ⅱ		보고내용 및 조치

(단위: 천원)

예산과목	계약금액	1회기성	6, 7차 작업	잔액	비고
합 계	304,068	189,112	81,609	33,347
접근시설	254,068	139,112	81,609	33,347
기전시설	50,000	50,000	-	-

○ 그간의 작업지시 예산내역

○ `19.8. 현재, 한강공원 진출입시설 유지보수공사 잔액은 33,347천원이나  시설물 이용시 시민불편에 따른 민원발생으로 추가 작업지시가 요구되나 예산이 부족한(공사비 75,000천원) 실정임

연번	공원별	시설명	정비내역 및 보수물량	비고
1	잠 실	잠실나루역 보행육교	∘한강공원 방향 계단부 누수발생(60㎡)
2	여의도	여의도 지하차도	∘지하차도 내 신축이음 파손(20m)
3	마 포	마포대교 남단	∘보행경사로 파손 및 부식(620㎡)
4	반포 외 5개공원	-반포공원 진출입로 -청암 보도육교 -잠실철교 남단 -평화의공원 -거울분수 -피아노물길	∘과속방지턱 손상(3m) ∘보행육교 상부 보도블럭 침하(15㎡) ∘한강공원 1층 승강기 진입로 판석 파손(5㎡) ∘평화의공원 연결 브릿지 차량출입금지(시설없음)(4개소) ∘일부바닥 판석 균열(2㎡) ∘경계석 탈락(210m)

○ 부족한 예산은 본 공사의 집행잔액(45,932천원)을 활용하여 한강공원 이용시민들의 안전을 도모하고자 함

Ⅲ		행정사항

○ 기획예산과에 재배정(45,932천원)요청하여 본 공사의 집행잔액을 사용하고,

○ 추가작업에 대하여는 시공사에게 우선 작업지시하고 추후 설계변경하여 정산 처리코자 함

○ 예산과목

- 한강공원 접근시설 유지관리(시설비) ※재배정요청액 45,932천원

붙 임 1. 8차 작업지시서(안) 1부.

2. 내역서(1회기성) 1부.  끝.