＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신자	에이치피아이 대표 최재민 귀하
(경유)
제 목	2019년 아리수올림터 모터펌프 수리 작업지시(2차-작업기간 변경)

1. 시설관리과-13544(2019. 7. 5.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소와 귀사 간에 계약하여 시행 중인『2019년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약)』와 관련하여 아래와 같이 작업기간을 변경하오니 기한 내 완료하고 그 결과를 사진을 첨부하여 제출하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2019년 아리수올림터 모터펌프 수리 작업지시(2차-작업기간 변경)

나. 변경내역(작업기간)

- 당    초 : 2019. 7. 8. ~ 8.23.

- 변    경 : 2019. 7. 8. ~ 8.28.

- 사    유 : 다른 기관과의 작업기간 중복에 따른 작업기간 절대부족으로 인한 연기(조정)

다. 작업위치 : 신정 및 목동 증압장 펌프실

라. 작업내용 : 붙임 “작업지시 내역서” 참조

마. 기타사항

- 배수지 운영에 지장이 없도록 조치 후 작업 시행

- 안전 및 재해사고 예방에 대한 작업자 안전교육과 안전장비 착용 철저

- 증압장 해당펌프의 양정과 유량에 맞추어 시공(수리)할것

※ 목동증압장(유량:0.25㎥/분, 양정:20m), 신월증압장(유량:1.3㎥/분, 양정:44m)

- 작업 완료시 물량 확인 후 계약금액 범위 내 정산시행

붙임 : 1. 작업지시서(1차-변경) 1부

2. 계약내역서 1부. 끝.

	강서수도사업소장
★주무관	양창진		기전팀장	代양창진		시설관리과장	08/23 代김남구
협조자
시행	시설관리과-16963	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4016	/전송	02-3146-4039	/		/	대시민공개