투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	자연석판석 규격변경에 따른 협의요청

1. 우리본부에서 시행하고 있는 『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』과 관련입니다.

2. 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 보도포장과 관련 자연석 판석 규격을 변경하여 시공하고자 하오니, 검토의견을 2019. 08. 28(수).까지 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 자연석 판석 규격 변경

구 분	내 용		변경사유
	변경 전	변경 후
보도구간 (돈화문로, 서순라길, 낙원상가 하부)	자연석 판석 (포천석 90%, 운천석 10%)	자연석 판석 (포천석 100%)	자연석 판석(운천석)의 수급에 문제가 있어 운천석을 포천석으로 변경 시공
이격공간 (돈화문로)	자연석판석 (운천석 100%)	자연석 판석 (포천석 100%)

따로붙임 : 포장상세도 등 관련도면(당초, 변경) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(역사도심재생과장),종로구청장(도로과)
주무관	이성열		광역도로과장	박일연		토목부장	08/23 代이동훈
협조자
시행	토목부-15215	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	san730@seoul.go.kr	/	부분공개(5)