등록번호	도로시설과-9317		주무관		보도관리팀장		도로시설과장		생활도시친화국장
등록일자	2019.8.23.
			박성범		박흥규		신대식		08/23 정택근
결재일자	2019.8.23.
공개구분	대시민공개
			협 조
『2019년 보도유지보수공사(연간단가, 시민참여)』 설계변경(1차) 검토 보고
생활도시친화국 도로시설과

『2019년 보도유지보수공사(연간단가, 시민참여)』

설계변경(1차) 검토 보고

『2019년 보도유지보수공사(연간단가, 시민참여)』관련, 추경예산 및 시 [재]배정 예산 반영에 따라 신규 공종, 시공물량 증·감이 발생하여 이에 따른 설계변경을 시행코자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2019년 보도유지보수공사(연단간가, 시민참여)

□ 도 급 자 : 두광건설(주) 대표 권재섭

□ 공사기간 : 2019.03.14. ~ 2019.12.20.

□ 공사개요 : 블록포장 18.2a, 화강석 포장 5.0a, 측구보수 503m

□ 사 업 비

총공사비	도급비	관급비	이전비 및 기타	비 고
1,093,808,510	543,808,510	350,000,000	200,000,000

Ⅱ		예산현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액			비 고
	계	본예산	추 경
계	1,740,000 (25,000)	1,250,000	490,000
보도유지보수공사	450,000 (15,000)	300,000 (15,000)	150,000	구비
평탄성 불량보도 및 보도턱 집중정비	200,000 (10,000)	200,000 (10,000)	-	구비
걷기편한행복거리만들기	908,000	568,000	340,000	시비
도로 안전시설 설치 및 정비	30,000	30,000	-	시비
도시비우기 사업	152,000	152,000	-	시비

※ 하단의()는 구비 사업예산 유보액임.

Ⅲ		관련근거

□ 市 재배정 보도유지관리 예산 집행계획 【도로시설과-7393(‘19.7.3)】

- 시도상 소파보수 정비

□ 市 재배정 보도유지관리 예산 집행계획 【도로시설과-9255(‘19.8.22)】

- 퇴계로 4533~463간 보행환경 개선

□ 마른내로(북측) 보행환경 개선공사 추진계획 【도로시설과-9165(‘19.8.20)】

- 구비 추경 편성에 따른 사업 추진

Ⅳ		보고내용

□ 설계변경 사유

- 추경예산 편성에 따른 시공물량 증가

- 신규 공종 발생 및 시공물량 증·감 반영

□ 공사금액 변경

(단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증·감액		비고
			증	감
총공사비	1,093,808,510	1,640,000,000	546,191,490	-
도 급 비	543,808,510	1,087,000,000	543,191,490	-
관 급 비	350,000,000	353,000,000	3,000,000	-
이 전 비	200,000,000	200,000,000	-	-

□ 공사규모 변경

구 분	블록 포장	화강석 포장	측구보수	비 고
당 초	18.2a	5.0a	503m
변 경	40.1a	8.9a	4,018m

□ 주요 공사물량 증·감

공 종	규격	단위	물량변경			비 고
			당초	변경	증·감
토사터파기	BH 0.2㎥, 야간	㎥	20	192	증) 172
콘크리트포장깨기	BH 0.2㎥, 야간	㎥	95	223	증) 128
잔토운반-중간집하장	BH 0.2㎥, 4.5톤, 야간	㎥	265	818	증) 553
잔토(콘크리트)운반-중간집하장	BH 0.2㎥, 4.5톤, 야간	㎥	175	644	증) 469
기계상차 (아스팔트, 콘크리트)	BH 0.7㎥, 주간	㎡	250	627	증) 377
측구표면보수 (평삭, 포장)	초속경, t=5~7㎝, 야간	m	76	2,009	증) 1933
측구표면보수 (평삭,포장)용 거더		m	76	2,009	증) 1933
횡단빗물받이 (L=1.0m)	450*700, H=0.6m	개소	-	4	증) 4
소형횡단빗물받이 (L=1.0m)	150*800	개소	-	6	증) 6
도로경계석 (시공량120m)	15*15*100㎝	m	38	336	증) 298
보차도경계석 (시공량80m)	20*25*100㎝	m	268	587	증) 319
혼합기층공(보도)	인력, T=10㎝, 야간	a	7	30.32	증)23.32
투수기층공(보도)	인력, T=10㎝, 야간	a	9	17.46	증) 8.46
보차도용콘크리트포장	T=10㎝, 3종, 기계, 야간	a	1	9.61	증) 8.61
가로수분 설치 및 철거	야간	개	14	203	증) 189
아스팔트표층	T=5㎝, 인력, 야간	a	1	9.59	증) 8.59
아스팔트중층	T=7.5㎝, 인력, 야간	a	1	4.8	증) 3.8
입도조정기층공	T=20㎝, 인력식기계	a	-	4.8	증) 4.8
보행안전도우미	작업구간 30m이하. 야간	일	40	141	증) 81
교통정리원	모범운전자회, 야간	일	48	404	증) 356

□ 마른내로(북측) 보행환경 개선공사 외 보도환경개선 민원이 다수인 실정으로 원활한 보행환경 개선을 위해서 유보액(25백만원)을 활용하여 설계변경코자 함.

⇒ 보도유지보수공사 유보액(15백만원),

평탄성 불량보도 및 보도턱 집중정비 유보액(10백만원)

Ⅲ		조치계획

□ 추경예산 편성에 따른 정비물량 증가, 공종별 시공물량 증·감 및 신규공종을 반영하여 상기와 같이 설계변경을 시행하고 추후 정산 처리코자 합니다.

Ⅳ		행정사항

□ 유보액 사용승인 요청(도로시설과 ⇒ 기획조정과)

□ 계약심사 및 일상감사 의뢰(도로시설과 ⇒ 감사담당관)

붙임  1) 관련문서 3부.

2) 설계변경내역서 1부.  끝.