- 중구민을 위한 도시 -
		서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 보안등 유지보수공사(연간단가) 설계변경(2회) 시행

도로시설과에서 시행중인 『2019년 보안등 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 보안등 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2019. 1. 28. ~ 2019. 12. 31.

다. 도 급 자 : 한울전력(주) 대표 유 인 철

라. 도 급 액 : 금207,239,000원

마. 설계변경 내역

구 분		금 액		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급비	공급가액	188,399,091	280,090,910	증 91,691,819
	부가가치세	18,839,909	28,009,090	증 9,169,181
	계	207,239,000	308,100,000	증 100,861,000

바. 설계변경 사유

- 관내 지중화사업 구간 한전주에 설치된 보안등 철거에 따른 추경예산을 반영하여 보안등 정비물량 변경

- 자동점멸기 교체 등 7월 말까지 보수내역을 반영하여 물량 조성

사. 예산과목

- 도로시설과, 도시기반시설확충, 도로조명관리, 좋은 빛환경 조성사업, 시설비 및 부대비, 시설비(구비) : 267,507,520원(증 100,861,000원)

- 주거환경개선과, 평생 살고싶은 마을 만들기 추진, 주거지 재생사업 추진, 성곽마을 보전·관리사업, 시설비 및 부대비, 시설비(시비) : 27,602,210원(증감 없음)

- 역사도심재생과, 지속가능한 역사문화도심 구현, 도심 역사문화 자원관리, 정동 역사재생사업, 시설비 및 부대비, 시설비(시비, 사고이월) : 12,990,270원(증감 없음)

붙   임 : 1. 설계변경(2차) 보고 1부.

2. 일상감사 처리결과 통보(일상감사 조정내역 및 사유서) 1부.

3. 심사내역서(2019년 보안등 유지보수공사) 1부.

4. 제경비 검증확인서 1부.  끝.

주무관							나권희			도로조명팀장					가순종					도로시설과장					신대식				생활도시친화국장						08/23 정택근
협조자				주무관						오은경					계약팀장							최영순					재무과장							박수돈
시행			도로시설과-9329									(	2019.8.23					)		접수											(						)
우	04558					서울특별시 중구 창경궁로 17 (예관동)															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-6153						/전송			02-3396-8839					/	lnr0823@junggu.seoul.kr												/	부분공개(5)