문서번호	시설보수과-4674
결재일자	2019.8.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		임준빈	08/23 代김광석
협조
	주무관		이석근

『도봉천 외 6개 하천 차집관로 보강공사 실시설계 용역』

최종 보고회 개최 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『도봉천 외 6개 하천 차집관로 보강공사 실시설계 용역』

최총 보고회 개최 결과 보고

우리센터에서 시행예정인 도봉천 외 6개 하천 차집관로 보강공사 실시설계 용역에 대한 최종 보고회 개최결과 보고임.

1		용역개요

□ 용 역 명 : 도봉천 외 6개 하천 차집관로 보강공사 실시설계 용역

□ 용역기간 : ‘19.05.23 ~ ’19.08.26.

□ 용 역 비 : 15,466,000원

□ 용 역 사 : ㈜동해종합기술공사  대표 정점래

□ 용역내용 : 공릉천, 당현천, 도봉천, 면목천, 무수천, 묵동천, 방학천 일원 적정한 보수ㆍ보강 비굴착 공법 선정 등 실시설계도서 작성

2		최종 보고회 개최

□ 일    시 : 2019. 8. 21.(수) 15:00 ~ 16:30

□ 장    소 : 본관 3층 회의실

□ 참 석 자 : 소장, 시설보수과장, 관련업무 담당자 등

□ 설 명 자 : ㈜동해종합기술공사 이웅기 이사

3		개최결과 및 조치의견

□ 설계내역서 제경비 및 전체공사비 대비 특허공법 적용 공사비율이 85.72%

이상인 경우 수의계약대상이므로 설계내역서 검토필요

(지방자치단체입찰 및 계약집행기준(행안부 예규 47호, 2018.11.08.) 제5장

수의계약운영요령 제3절)

□ 물돌리기 시 시민생활불편요인 사전해소를 위한 필요사항 설계반영 필요

□ 작업중 돌발강우 시 현장문제야기가 안되도록 3Q 기준으로 물돌리기 검토 등

□ 금회 공사가 시행되지 않는구간(당현천, 공릉천, 면목천)은 제외하고 공사가 시행되는 구간 4개 하천(도봉천, 무수천, 묵동천, 방학천) 「도봉천 외 3개 하천 차집관로 보강공사」로 공사명 수정하여 표기 검토.

설계도서 납품시 검토된 의견을 수렴하여 반영토록 하겠음

4		사업추진에 따른 문제점

□ 『우이천외 6개 하천 차집관로 보강공사 실시설계용역』 수행결과 공사물량이

감소되어 배정된 예산 집행잔액(예정)이 발생됨.

□ 『도봉천외 6개 하천 차집관로 보강공사 실시설계용역』 수행결과 보강물량이

증가되어 예산 부족 발생.

※ 소요예산현황

(단위 : 천원)

사업명	우이천외 5개 하천 차집관로 보강공사	도봉천외 4개 하천 차집관로 보강공사	비 고
배정예산	1,500,000	1,000,000
실시설계비(발주)	******	******
보강공사비(설계)	*********	*********	폐기물처리비3,260천원포함
계	*********	*********
예산현황	*********	**********

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 물건비, 수선유지교체비,수선유지비

5		예산사용 검토의견

□ 사업비는 공사명이 확정되어 배정되었으나 비목이 동일한 공통유지보수예산

으로서 우이천외 5개 하천 차집관로 보강공사비 잔여예산을 활용하여 예산이      부족한 도봉천외 4개 하천 차집관로 보강공사비 예산으로 사용코자 함.

※ 우이천외 6개 하천 : 15억원→11억원, (감) 4억원

도봉천외 6개 하천 : 10억원→13억원, (증) 3억원

6		조 치 계 획

□ 우이천 및 도봉천외 6개 하천 실시설계 용역 계약심사 결과를 반영하여          발주예정(‘19.8월)

7		향후계획

□ ‘19. 8. : 계약심사의뢰 및 설계용역 준공

□ ‘19. 9. : 공사 발주, 계약 및 착공

□ ‘19. 12. : 공사준공

붙임 : 1-1. 공사원가계산서 1부.

1-2. 폐기물처리내역서 1부.

2. 수량산출서 1부.

3. 시방서 1부.  끝