투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(시립북부장애인복지관 증축 공사)

「시립북부장애인복지관 증축 공사」와 관련하여 아래와 같이 공사기간 연장(변경계약)을 의뢰하오니 처리하여주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 시립북부장애인복지관 증축 공사

나. 계 약 자 : 유호산업개발(주) 외 2

****************************************

********************************

마. 변경계약 요청내용

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	*******************	*******************	증) 35일
계약금액	*************	*	변경없음

바. 변경사유 : 잦은 강우로 공사지연에 따라 공사기간 연장

붙 임 1. 공기연장 검토보고 및 준공기한 연기의뢰서 각 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	이랑		복지시설과장	조영수		건축부장	08/23 임인구
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	건축부-14568	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2654	/전송	02-3708-2659	/	leerang01@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)