＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1회) 시행(2019년 포장복구공사)

우리사업소에서 시행중인 『2019년 서부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행하고자 합니다.

가. 공  사  명 : 2019년 서부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 계약대상자 :***********************

다. 공사  기간 : 2019. 06. 03. ~ 2020. 6. 30.

라. 설계변경 금액내역                                               (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총 공사비		*************	*************	0
도급비	1차수(2019년)	789,954,000	789,954,000	0
	2차수(2020년)	384,134,100	384,134,100	0

마. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 계약물량 증 ․ 감

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
합 계	1,174,088,100	1,174,088,100	0
1.토 공	117,714,862	177,178,237	+59,463,375	아스팔트포장절단 등
2.포장공	486,798,333	446,799,921	-39,998,412	보조기층공 등
3.부대공	77,960,526	77,706,450	-254,076	소형공사안내간판 등
4.사급자재비	85,918,121	71,404,304	-14,513,817	보조기층재 등
5.제경비	405,696,258	400,999,188	-4,697,070	산재보험료 등

바. 최대정산 이행금액(1회 최대 정산금액) : 금500,000,000원

사. 예산과목 : 상수도사업비용 영업비용 배급수비 신설공사비

자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비및부대비 시설비

상수도사업비용 영업비용 배급수비 수선유지교체비 기타교체비

소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설설치, 시설비

소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설보수, 시설비

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 사전심의 의결서 1부.

3. 합의서 1부. 끝.

주무관	김승완		급수운영과장	代김찬모		서부수도사업소장	08/26 代한병주
협조자
시행	급수운영과-15459	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	3146-3651	/전송	3146-3689	/	wan300@seoul.go.kr	/	부분공개(7)