문서번호	시설보수과-7442
결재일자	2019.8.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		박병연	08/26 박문희
협조

- 등촌지하차도 보수공사

공사추진에 따른 실정보고

2019. 8.

강서도로사업소

[시설보수과]

등촌지하차도 보수공사

공사추진에 따른 실정보고

우리 사업소에서 추진중인「등촌지하차도 보수공사」와 관련, 본청 예산배정에 따라 LMC포장 관련 추진계획을 보고 드림.

※관련근거 : 공사추진에 따른 실정보고[시설보수과-6411호(‘19.7.24)]

예산재배정[도로시설과-10155호(‘19.8.26)]

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 등촌지하차도 보수공사

○ 공사기간 : 2019. 3. 4 ~ 2019. 9. 17

○ 공사규모

- 아스팔트 포장 25.6@, 신축이음보수 112m, 콘크리트 표면보수 176㎡

○ 도 급 비 : 171,237,000원

○ 도 급 자 : 동영건설  대표 손한익

○ 감 독 자 : 서울시설공단(공사감독 1처) 이임규

○ 예산현황 : 총공사비 206,837,000원

(도급비 171,237,000원. 관급자재비 26,270,000원. 이전비 9,330,000원)

※ 공사 낙찰차액 : 23,163천원

○ 현재공정 : 40%

Ⅱ		실정보고 내용

1. 등촌지하차도 LMC 포장관련 추진사항 보고

1) 공사추진에 따른 실정보고 : LMC 포장예산 재배정

▶ 목동14단지앞 목동역방향 2차로 LMC 포장 계획 보고 : 2019.7.24

▶ LMC 포장공법 관련 위원회 개최 : 2019. 8. 1

▶ 본청 도로시설과 예산요청 : 300백만원(‘19.8.2)

2) 공사 부족예산 재배정 통보

▶ 본청 도로시설과-10155호(‘19.8.26)

▶ 예산 재배정금액 : 300백만원

2. 예산 재배정에 따른 추가 작업지시필요

1) 등촌지하차도 공사감독기관인 서울시설공단에 추가 작업지시

▶ 추가 작업지시 주요내용 :14단지앞 목동역방향 LMC포장 1,289㎡

▶ 오금교 방향 차선은 당초 설계와 같이 아스콘 포장 시행

Ⅲ		향후 조치계획

○ 등촌지하차도 공사시행관련 추가 작업지시(LMC포장)

▶ 14단지앞 U타입구간 포장관련 주민불편이 최소화 되도록 서울시설공단에 즉시 공사를 시행토록 작업지시

(목동역방향 LMC포장, 오금교방향 아스콘포장)

○ 공사완료후 설계변경시 반영하여 정산 조치.

첨부 : 1) 관련공문 1부(예산배정)

2) 예산 검토내역서(LMC포장) 1부. 끝.