문서번호	시설보수과-7444
결재일자	2019.8.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	08/26 박문희
협조
	관리단속과장		박종윤

2019년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)

설계변경 보고서(제2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

2019년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)

설계변경 보고서 (제2회)

『화곡터널 보수』 관련 재배정된 예산과 낙찰차액 예산을 반영하여 신규발생 공종 및 수량변경 사항을 반영 설계변경 시행하고자 함

※ 도로시설과-8576(‘19.8.5.)호 및 시설보수과-6996(‘19.8.12.)호 : 예산재배정

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 2019년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)

❍ 공사규모

- 포장보수 20@,  교면방수 1,700㎡, 신축이음보수 105m, 기타 1식

❍ 공사기간 : 2019. 3. 5 ~ 12. 20

❍ 도 급 자 : 레오개발(주) 대표 양공진

❍ 예산현황 : 1,002,753,000원

(도급비 803,758천원, 관급비 120,000천원, 이전비 79,000원)

	< 예산현황 >
▷예산배정: 1,126,000천원(도급비 927,000, 관급비 120,000, 이전비 79,000) ▷계약금액: 1,002,758천원(도급비 803,758, 관급비 120,000, 이전비 79,000) ▷변경검토: 1,426,000천원(도급비 1,306,000, 관급비 37,000, 이전비 83,000) ※ 재배정 예산 : 300,000천원(화곡터널 표면보수), 낙찰차액 : 123,242천원

Ⅱ		설계변경 주요내용

❍ 오목교동측지하보차도외 3개소 : 7차 작업지시

▶ 방호울타리 : 당초 0 경간 → 변경 14경간

▶ 충격흡수시설 : 당초 0 개소 → 변경 2개소

▶ 개봉지하유타입부 방음유리 : 당초 24 개소 → 변경 30개소

❍ 작업지시 예정물량 반영

▶ 화곡터널 옹벽부 콘크리트면보수 : A=1,955㎡

▶ 염창IC 유도배수판 설치 : 40m, 콘크리트면보수 : 250㎡

▶ 가마산지하차도 동결방지 열선 설치 : 138m

▶ 구로역지하차도 보도부 옹벽 표면보수 및 타일보수 등 : 100㎡

▶ 외발산지하차도 타일보수 등 : 50㎡

▶ 국회앞지하차도 배면누수 보수 등 : 10㎡

▶ 기타 시설물점검시 지적사항 등 : 1식

❍ 신규 공종 발생, 작업물량 증·감, 기타 경미한 사항 등

❍ 공종별 수량 증·감내역

공 종	단위	당초수량	변경수량	증.감수량		비고
교면보수공	a	14.52	12.52	(감)	2
방수공	㎡	1,327	1,252	(감)	75
신축이음보수공	m	28	58	(증)	30
콘크리트보수공(표면,단면)	㎡	1,547.75	3,933.76	[증]	2,386.01	화곡 터널
강제보수공(강관배관)	m	10	30	[증]	20
상판보수공	㎡	31.04	25.04	[감]	6
도장보수공	㎡	18	0	[감]	18
기타보수공	식	1	1

※ “신규 일위대가”에 대한 단가반영은 낙찰율 86.745%를 적용

Ⅲ		공사비 변경내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 , 감	비 고
총 공사비	1,002,758,000	1,426,000,000	증) 423,242,000
도 급 비	803,758,000	1,306,000,000	증) 502,242,000
관 급 비	79,000,000	37,000,000	감) 42,000,000
이 전 비	120,000,000	83,000,000	감) 37,000,000

※ 화곡터널 옹벽콘크리트 면보수 재배정예산(300백만원) 및 낙찰차액 등 반영

Ⅳ		조 치 의 견

❍ 상기 내용과 같이 신규발생 공종 및 수량 변경사항에 대하여는 설계 변경 시행하고, 도급자로 하여금 재계약토록 통보하고자 함.

붙임 : 설계변경내역서(제2회) 1부.   끝.