문서번호	도시철도설비부-8169
결재일자	2019.8.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박명기		이명수	08/26 구자훈
협 조	송변전과장			백성현
	시설전기과장			김흥정
	설비공사과장			황영일
	정보통신과장			추경수
	신호과장			구봉서

신림선 경전철 민간투자사업

실시계획변경승인 관련 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 08

도시기반시설본부

도시철도설비부

신림선 경전철 민간투자사업

실시계획변경승인 관련 검토보고

남서울2019-547(‘19.7.5)호 및 도시철도사업부-6692(’19.7.8)호 “신림선 경전철 민간투자사업 실시계획 변경(5차)승인을 위한 업무협의에 따른 설비분야에 대한 검토 보고임.

1		사업개요

○ 사업명 : 신림선 도시철도 민간투자사업

○ 구  간 : 여의도(9호선)∼대방(국철)∼보라매(7호선)∼신림(2호선)∼서울대입구

○ 공사기간 : 2017.02∼2022.02 (60개월)

○ 사업시행자 : 남서울경전철주식회사(주간사 : 대림산업)

○ 총공사비 : 4,464억원(‘07.7.1 불변가 기준)

- E&M(설비)분야 공사비 : 1,474.3억원

계(억원)	전기	검수	기계(소방)	통신	신호	비 고
1,474.3	463.95	38.66	398.24	255.55	317.9	협상가

2		추진경위

○ ‘15.08.12 : 실시협약체결[서울시-남서울경전철(주)]

○ ‘16.09.08 : 실시계획승인[용지보상 및 가시설 분야 토목분야 한정]

○ ‘17.01.26 : 실시계획변경(1차)승인(토목, 건축, 설비 전체 분야)

○ ‘17.11.22 : 실시계획변경(2차)승인(지번정리, 면적정정)

○ ‘18.12.06 : 실시계획변경(3차)승인(아파트 민원으로 선형계획 변경)

○ ‘19.05.13 : 실시계획변경(4차)승인(보상관련 지번변경 등)

○ ‘19.07.05 : 실시계획변경(5차)승인 신청

3		실시계획 변경(5차) 사항 검토

○ 총사업비 변경 내용

- 송변전/전차선 : 104정거장 변전소 삭제외 7건

- 시설전기 : 전기실 특고압반 추가외 6건

- 정보통신 : 열차무선설비 변경외 4건

- 기계(소방) : 소방설비 내진설계외 6건

○ 총사업비(공사비) 변경 금액 검토결과

- 분야별 감리 검토

(단위 : 백만원, 불변가)

구 분	계	전 기		신 호	통 신	기계설비
		송변전/전차선	시설전기
총 사 업 비	143,564	26,909	19,486	31,790	25,555	39,824
① 변경요청 (사업비 증·감)	152,653 ( 9,089)	26,204 ( -705)	19,908 ( 422)	31,790 ( 0 )	33,080 ( 7,525)	41,671 ( 1,847)
②검토결과 (사업비 증·감)	151,224 ( 7,660)	26,204 ( -705)	19,908 ( 422)	31,790 ( 0 )	31,911 ( 6,356)	41,411 ( 1,587)
감 액 (①-②)	1,429	0	0	0	1,169	260

※ 총사업비 변경사항은 “실시협약 제13조 ⑦항”에 의거 각 분야별 감리 검토

4		처리의견

○ 총사업비(공사비) 변경금액 검토결과를 도시철도사업부에 통보

붙 임

1. “신림선 실시계획 변경(5차) 승인신청서 재보완 요청에 대한회신(남서울2019-669,‘19.8.22)” 공문 1부.

2. “신림선 실시계획 변경 승인신청서 보완 요청에 대한 회신(남서울2019-597,‘19.7.25)” 공문 1부

3. 신림선 경전철 설비분야 총사업비 변경 내역 1부. 끝.