“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역기간 연장 의뢰(사당천 단면확장 기본 및 실시설계)

1. 우리과에서 계약한 「사당천 단면확장 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 용역기간 연장을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 사당천 단면확장 기본 및 실시설계

○ 계약업체 : ㈜화신엔지니어링,㈜동해종합기술공사

○ 과업내용 : 사당천 단면확장(암거신설)

나. 변경내용

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
용 역 비	697,037	697,037	-
과업기간	‘18.5.14. ~ ‘19.8.31	‘18.5.14. ~ ‘19.11.30

○ 변경사유

- 설계VE 결과 회신이 10월로 예정되어 설계 VE결과 반영을 위한 기한 소요

○ 예산과목 : 도시개발특별회계, 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 사당역 일대 배수개선

붙 임 : 1.방침서 1부.

2.합의각서 및 준공기한 연기 의뢰서 1부.끝.

	하천관리과장
주무관	윤희성		하천생태팀장	민형일		하천관리과장	08/26 한유석
협조자	계약1팀장	조현
시행	하천관리과-12463	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)