문서번호	토목부-15319
결재일자	2019.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	08/27 김용제
협조
	주무관		황윤기

설계변경(전체19회, 7차4회) 검토 보고

《천호대로(광나루역) 확장공사》

2019. 08.

도시기반시설본부

(토목부)

설계변경(전체 19회, 7차 4회) 검토 보고

《천호대로(광나루역) 확장공사》

실정 보고 사항, 인수·인계기관 추가 요청사항 등을 반영하기 위하여 설계변경(전체19회, 7차4회)하고자 보고 드림.

※ 관련근거 : 수성 제2019-2944호(2019.08.20.)

1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 규    모

- 도로확장 : 폭 6→10차로,  연장 900m (지하차도 580m 포함)

- 중앙버스 전용차로 설치 2,600m(정류장 5개소)

○ 공사기간 : ’10.10.11. ∼’19.08.30.(7차 : ’17.07.05.∼’19.08.30.)

○ 계약금액 : 전체 58,994백만원 (7차 : 14,065백만원)

○ 시 공 사 : 해동건설㈜ 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜ 수성엔지니어링

2		보고 내용

□ 설계변경 사유

○ ‘상징조형물 설계도서 검토 반영’ 및 ‘중앙버스전용차로 보도정비 공사’ 등 기 승인된 실정보고 사항 설계변경 반영

○ 인수인계기관 요청사항 반영에 따른 상부공원 추가 시설물(파고라, 화장실 등) 설치를 위한 7차공사 및 전체공사 사업비 조정 및 공기 연장

□ 설계변경 현황

○ 변경 계약

(단위 : 천원)

구 분	계약기간 (일)			계약금액 (천원)			설계변경 사유	비고
	당초	변경	증·△감	당초	변경	증·△감
전체	********* * *********	********* * *********	* ***	**********	**********	*******	************************ ****************************
7차	********* * *********	********* * *********	* ***	**********	**********	*******

※ 전체내역 중 미발주분 추가 반영

○ 주요 변경내용

(단위 : 백만원)

변 경 내 용		전체분			금회(7차)			관련문서
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
1	************* *********	*	*	*	*	*	*	***********	*********
2	******* *************	*	**	**	*	**	**	***********	*********
3	****** ************	*	**	**	*	**	**	***********	*********
4	**************	*	**	**	*	**	**	***********	*********
5	********* ******	*****	*****	**	*****	*****	**	***********	*********
6	**************** **********	***	*****	***	***	*****	***	***********	*********
합 계		*****	*****	***	*****	*****	***

○ 공사비 변경(전체18회, 7차3회)

(단위 : 백만원)

공 종	전 체 분			금 회(7차)			비고
	당 초	변 경	증ㆍ감	당 초	변 경	증ㆍ감
1. 직 접 공 사 비	******	******	***	*****	******	***
1) 토 공	*****	*****	*	***	***	*
2) 비탈면안정공	*****	*****	*	**	**	*
3) 배수 및 옹벽공	*****	*****	*	***	***	*
4) 구 조 물 공	******	******	*	*****	*****	*
5) 포 장 공	***	***	*	***	***	*
6) 교통안전시설공	***	***	*	***	***	*
7) 부 대 공	*****	*****	**	***	***	**
8) 상 수 도 공 사	*****	*****	**	****	****	**	*
9) 조 경 공 사	***	***	*	*	*	*
10) 경관개선공사	*****	*****	**	*****	*****	**
11) 중앙버스전용차로	*****	*****	**	*****	*****	**
12) 상징조형물	*****	*****	***	*****	*****	***
2. 간 접 공 사 비	*****	*****	**	*****	*****	***
3. 미확정설계공종	***	***	*	**	***	*
4. 제요율제외적용	*****	*****	*	***	***	*
5. 물가변동액(K1=3.16%)	***	***	*	*	*	*
6. 물가변동액(K2=3.42%)	***	***	*	*	*	*
7. 물가변동액(K3=3.46%)	**	**	*	*	*	*
공 급 가 액	******	******	***	******	******	***
8. 부 가 가 치 세	*****	*****	**	*****	*****	**
10. 이 전 비	***	***	**	***	***	**
도 급 액	******	******	***	******	******	***
관 급 자 재	******	******	***	*****	*****	***
이 설 비	***	***	*	*	*	*
원인자 부담금	*	*	*	*	*	*
총 공 사 비	******	******	***	******	******	***

○ 준공기한 변경

- (당초) 2019.08.31. → (변경) 2019.11.30. (증 91일)

- 공사기간 연장사유

**********************************************************************************

**************************************

3		조치계획

○ 공사 실정보고 등 물량 증·감을 반영한 전체 및 7차 계약금액 조정과 공기연장에 대한 감리단의 검토의견이 타당하므로 설계변경하여 사업추진에 차질이 없도록 조치코자 함

붙  임 : 감리단 공문(검토의견서) 1부.  끝.