문서번호	정수시설과-8029
결재일자	2019.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
양묘식	유영춘	08/27 가길현
협 조

전기설비 유지보수공사(총차,1차) 설계변경1회(정산) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.8.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

우리 정수센터 전기설비 유지보수공사(1차) 시행중 설계변경 사항이

발생하여 변경시행코자 다음과 같이 보고드림

전기설비 유지보수공사(총차,1차) 설계변경1회(정산) 보고

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 전기설비 유지보수공사(장기계속공사)

○ 도 급 자 : 동하시티개발㈜ 대표 윤종사

○ 도 급 액

- 총차 : 금93,570,960원

- 1 차 : 금88,287,450원

- 2 차 : 금5,283,510원

○ 공사기간

- 총차 : 2019. 4.1 ~ 2020. 3.31

- 1 차 : 2019. 4.1 ~ 2019.12.31

- 2 차 : 2020. 1.1 ~ 2020. 3.31

○ 변경내용 : 따로붙임 “설계변경 내역서” 참조

○ 관련근거

- 지방자치단체 공사계약일반조건 제4장(행정안전부예규 제253호)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장8절,13장6절(행정부안전부예규 제34호)

2. 설계변경 사항

○ 신규공종 발생 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경

- 관련문서

. 정수시설과-2362(2019.4.1) : 취수장 전기실 냉방기 조달구매

. 정수시설과-4101(2019.5.15) : 1송수펌프동 모터기동반1호 직렬리액터 교체계획

. 정수시설과-4651(2019.5.28) : 2정수 오존접촉지 드레인 배수펌프 설치계획

. 정수시설과-7482(2019.8.9) : 신탈수기실 냉방기 구매

- 기타 미사용 물량조정

- 계약물량 증, 감 및 신규물량 : 따로붙임 “물량증감사항”

구 분	당 초	변 경	증,감	비 고
총 차	93,570,960	93,570,960	-	내역변경
1 차	88,287,450	88,287,450	-	내역변경
2 차	5,283,510	5,283,510	-	2020.1.1시행예정

○ 공사비 증감내용                                     [단위:원]

3. 조치계획

○ 변경된 설계내용에 따라 건설공사 설계변경 심의위원회를 개최후결과를 반영하여 변경계약 및 기성준공 처리코자함

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 물량증감사항 1부.  끝.