문서번호	거점성장추진단-1567
결재일자	2019.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		애니타운팀장	산업거점활성화반장
임형준		김인호	08/27 정덕영
협조
	주무관		김민주

서울애니메이션센터 재건축 사업

유적 보존방안 문화재위원회 심의 결과보고

2019.8.

경 제 정 책 실

(거점성장추진단)

서울애니메이션센터 재건축 사업

유적 보존방안 문화재위원회 심의 결과보고

서울애니메이션센터 재건축 사업 부지 내 유적 보존방안에 대한 문화재청 문화재위원회(매장문화재분과) 심의 결과를 보고드림

□ 심의개요

○ 일    시 : ’19.8.21.(수) 13:00~

○ 장    소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실

○ 심의명칭 : 문화재청 문화재위원회(제8차 매장문화재분과 위원회) 심의

○ 심의안건 : 서울애니메이션센터 재건축 사업부지 내 유적 보존방안

○ 출석위원 : 매장문화재분과 위원장 등 9명

○ 심의진행 : 문화재 발굴조사 결과, 유적 보존방안 발표 및 질의응답

□ 추진경위

○ ’17.7.~8.	: 표본조사 (현장 발굴 : 7.25.~8.1.)

○ ’19.1.~4.	: 입회조사 (입회 기간 : 1.14.~4.2.)

○ ’19.4.	: 시굴조사 (2,057㎡, 현장 발굴 : 4.3.~4.11.)

○ ’19.4.15.	: 시굴조사 학술자문

○ ’19.5~	: 정밀발굴조사 (5,000㎡, 현장 발굴 : 5.7.~)

○ ’19.5.27.	: 정밀발굴조사 학술자문 (1차)

○ ’19.7.5.	: 정밀발굴조사 학술자문 (2차)

○ ’19.7.17.	: 문화재청 전문가 검토회의 (매장분과위원장 등 3인)

○ ’19.8.7.	: 문화재청 전문가 현지조사 (매장분과위원장 등 5인)

○ ’19.8.13.	: 발굴유적 보존방안 발표자료 문화재청 제출

□ 심의내용

○ 발굴조사 결과

- 일제강점기 조선통감부와 총독부 관련 건물의 기초가 확인됨

○ 보존 방안 : 이전 보존

- 조선총독부 출입구 시설 및 주변 건물기초 유구(8M×12M)는 현 위치에서 근거리 이동(수직 2M, 수평 4M)하여 지하1층 역사전시실에 이전 보존

- 당초의 다목적실, 공조실 용도를 변경하여 지하1층에 역사전시실 확보(450㎡)

- 역사전시실은 남산 예장자락의 역사와 건축물의 기록, 조선총독부 출입구 시설 등 발굴유구 전시 및 방송국·국토통일원 등의 영상자료 등으로 구성

- 기타 주요 발굴유구의 부재 등을 활용하여 녹지공간 등 야외에 전시

※ 8.7. 문화재청의 전문가 현지조사 의견을 반영하여 보존방안 마련

□ 심의 결과 : 원안가결

○ 원안가결 9명/출석 9명

□ 향후 계획

○ ’19.9.~10.	: 신축공사 발주 사전절차 및 공사계약 (도시기반시설본부)

- 발주계획 방침 → 일상감사/계약심의위원회 → 조달청 의뢰(9월)

- 낙찰자 결정 및 계약(10월~11월)  ※「종합평가 낙찰자 결정기준」(행안부 예규)

○ ’19.11.~’22.6. : 신축공사 착공 및 준공

- 발굴유적 보존에 따른 설계변경은 신축공사 착수와 병행하여 진행

※ 붙임 1. 발굴유적 보존방안 발표자료(서울시) 1부.

2. 제8차 매장문화재분과 위원회 회의록(발췌) 1부.  끝.