문서번호	도로관리과-13649
결재일자	2019.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		부속물관리팀장	도로관리과장
고동오		이수범	08/27 김진효
협 조

- 도로 교통소음 저감을 위한 -

방음벽 설치예산 재배정(2차) 계획

2019. 8.

안전총괄실

(도로관리과)

- 도로 교통소음 저감을 위한 -

방음벽 설치예산 재배정(2차) 계획

우리시 도로 교통소음 저감을 위한 방음벽 설치(신설·재설치·정비) 예산 2차 재배정 계획(추가)을 보고드림

□ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액			재배정			집행 잔액
	계	당해 년도	명시 이월	소계	당초	반납액
방음시설 설치 및 보수·보강	3,313	3,223	90	2,933	3,289	- 356	24
2차 재배정 예산						380

※ 기배정한 영등포구 ‘윤중중학교 방음벽 교체공사’ 관련 학교측과 협의과정중 사업물량 축소

□ 1차 재배정 현황(2019.2.1.)

(단위 : 백만원)

연번	기관명	사업비	사 업 내 용	비고
	계	3,313
1	용산구	290	한남초등학교 방음시설 교체(L=135m, H=3m)
2	성동구	400	성원중 방음벽 설치(L=101m, H=5.5m)
3	금천구	270	방음시설 교체공사 (문성초·가산초 L=218m, H=6m)
4	송파구	48	아주중학교 외 5개소 방음벽 정비 (H=2.5m, W=2.0m) 25매 교체
5	영등포구	324	윤중중학교 방음벽 정비(H=3.5m, L=175m)
6	영등포구	600	대림동 신동아 아파트 방음벽(L=240m, H=5m, 불투명→투명형)
7	도봉구	220	문화고교앞 방음벽 설치(L=170m, H=4m)
8	양천구	700	신월동 벽산블루밍아파트 방음벽 설치(L=160m, H=7~10m)
9	광진구	25	(광장현대 3단지)방음벽 설치공사관련 실시설계용역
10	동작구	56	흑석초 일대 방음벽 정비(H=6.0m, L=60m)
11		380	집행잔액

□ 사업대상지 선정기준

○ 정온한 환경이 요구되는 학교, 병원 등에서 방음시설 미설치 또는 노후된 지역

○ 예산의 효율적 집행을 위해 가급적 ’19년내 완료 가능한 사업

□ 2차 재배정(추가) 계획

○ 도봉구 문화고(마들로 598) 앞 방음벽 신설

- 재배정 사업비 : 300백만원

- 현 황 : 마들로 및 방학로와 인접, 방음벽 미설치됨

- 사업규모 : 인접 방학로 일대 방음벽 신설(H=3.5m, L=265m)

- 사 유

□ ’19년 220백만원 사업계획(기배정)하였으나 학교측과 협의과정중 사업물량(90m) 증가 → ’20년 300백만원 추가 배정요청

□ ’19.8월말 실시설계 완료 → 9월중 시설공사 발주 예정

○ 강북구 오현초(월계로 221) 방음벽 재설치 실시설계 용역

- 재배정 사업비 : 40백만원

- 현 황 : 월계로와 인접, 방음벽의 노후정도가 큼

※ 설치년도는 개교년도인 91년으로 추정

- 사업규모 : 인접 월계로 방음벽(H=3m, L=150m) 재설치 실시설계 용역

- 사 유

□ ’20년 400백만원 사업비 요청(실시설계용역 40백만원, 시설비 등 360백만원)

□ 안전하고 정온한 학교 주변시설 조성

○ 영등포구 우신초(신길로 190) 방음벽 정비 실시설계 용역

- 현 황 : 신길로와 인접, 방음벽 노후정도가 큼(목재재질)

- 재배정 사업비 : 20백만원

- 사업규모 : 인접 신길로 방음판(H=3m, L=150m) 정비 실시설계 용역

- 사 유

□ ’20년 200백만원 사업비 요청(실시설계용역 20백만원, 시설비 등 180백만원)

□ 학교 인접 밀페공간 개선(불투명형 → 투명형)으로 정온한 면학분위기 조성

○ 2차 사업비(추가) 재배정 계획

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로 부속물 관리, 방음시설 설치 및 보수 보강, 시설비

구 분	요청액	재배정 계획				소요내역
		계	’19년도		’20년도
			1차	2차
계	1,200	1,200	220	360	540	집행잔액 380백만원
도봉구(문화고)	520	520	220	300	-	시설비
강북구(오현초)	400	400	-	40	360	실시설계 용역
영등포구(우신초)	200	200	-	20	180	실시설계 용역

□ 향추 추진계획

○ 2019.8. : 예산 감·재배정(도로관리과 → 재배정기관)

○ 2019.9. : 시설공사(용역) 발주 및 계약(재배정 기관)

○ 2019.12.31. : 공사 및 준공(재배정 기관)

붙 임 : 사업설명서 각 3부.  끝.