투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	기반시설과장
(경유)
제목	변경 계약체결 보고 [월드컵분수대 이전 설치공사]

기반시설과-2606(2019.08.23.)와 관련 다음과 같이 계약 변경 되었음을 알려 드립니다.

가. 건    명: 월드컵분수대 이전 설치공사

나. 계약업체: ㈜합동종합건설  대표  김춘옥

다. 변경내용: 준공기한 연기(태풍의 영향권으로 분수이전 일자를 조정함에 따라 안정적 공사수행을 위해 기간연장)

붙임: 1)공사변경계약서  1부.

2)계약보증서  2부.  끝.

	총무부장
주무관	장연심		총무과장	한정훈		총무부장	08/27 기봉호
협조자
시행	총무과-12275	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02)3780-0658	/전송	02)3780-0745	/	jjj1121@seoul.go.kr	/	부분공개(6)