문서번호	거점성장추진단-1510
결재일자	2019.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	산업거점개발팀장	산업거점활성화반장
최소영	송홍규	08/27 정덕영

-G밸리 개발계획(변경) 및 실시계획 수립관련-

교통영향평가 용역 준공기한 연기 보고

2019. 8.

경제정책실

(거점성장추진단)

- G밸리 개발계획(변경) 및 실시계획 수립 관련 -

교통영향평가 용역 준공기한 연기 보고

본 용역인 서울디지털산업단지(G밸리) 개발계획(변경) 및 실시계획 수립 용역 계약기간 연장에 따라 교통영향평가 용역 준공기한을 연기하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울디지털산업단지(G밸리) 개발계획(변경) 및 실시계획 수립에 따른 교통영향평가 용역

○ 과업범위 : G밸리 1,925천㎡(1단지 451천㎡, 2단지 388천㎡, 3단지1,086천㎡)

**********************************

※과업 완료일 : 서울시지방교통영향평가심의위원회(또는 지방산업단지계획심의위원회)의 심의를 완료 후 산업단지 개발계획(변경) 및 실시계획인가를 위한 산업단지계획심의위원회 심의 및 지형도면고시 완료시

*******************************************

*****************************

○ 과업내용 :「서울디지털산업단지(G밸리) 개발계획(변경) 및 실시계획」수립에 따른 개발구역 및 주변지역의 교통 환경에 미칠 영향을 예측하고 대책을 수립

□ 추진현황

○ ’17. 3.   :「G밸리 개발계획(변경) 및 실시계획 수립」교통영향평가 추진계획 수립

○ ’17. 4.   : 기술용역타당성 심사

○ ’17. 4.   : 교통영향평가 용역 발주

○ ’17. 6.   : 용역 계약 및 착수

○ ’17. 6.~ : 사업지 주변 교통현황 파악 등 기초 자료 조사

□ 변경 내용

○ 계약기간 연장

**********************************

*******************************************

*******************

**************

***********************************************************************************************

********************************************************************************************************************************

□ 향후계획

○ 준공기한 연기 의뢰 : 재무과

※ 붙  임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.    끝.