투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	토목부장
(경유)
제 목	조경분야 설계변경소위원회 자문요청에 대한 회신(올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사)

1. 토목부-15328(2019.8.27.)호와 관련입니다.

2. ‘노들길 비탈면 보호를 위한 초화류 식재’건에 대하여는 아래와 같은 추진경위로 추진된 사안으로

가. 노들길 확장구간 비탈면 보호공법 선정검토보고(여의램프 제2019-61,2019.4.18.)

(건설사업관리단 → 토목부)

나. 자동차 전용도로(올림픽대로) 비탈면 수목식재 협의(토목부-6806, 2019.4.19.)

(토목부 → 서울시도로시설과, 서울시설공단)

다. 자동차 전용도로(올림픽대로) 비탈면 수목식재 협의회신(도로시설과-5117, 2019.4.25.)

(서울시도로시설과 → 토목부)

라. 업무지시(노들길 확장구간 비탈면 보호공법) (토목부-7417, 2019.4.29.)

(토목부 → 건설사업관리단)

3. 상기 추진경위에서와 같이 ‘올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사’의 조경감독부서인 우리부와 협의 및 보고 등의 과정없이 사업주관부서인 귀 부에서 공법검토와 관련부서 협의 후 시공완료한 사안으로  ‘노들길 확장구간 비탈면 보호를 위한 초화류 식재’건에 대한 실정보고에 대하여는 귀 부에서 검토(승인) 후 설계변경함이 타당하며

4. 상기의 사유로 우리부에서 진행하는 조경분야 설계변경소위원회 심의상정은 불가한 실정으로 우리본부 조경분야 설계변경 소위원회 자문위원 명단을 송부하오니 토목분야 설계변경 소위원회에 반영하여 처리하시기 바랍니다.

※ 건축분야 설계변경 소위원회 조경공종 포함될 경우 건축부의 요청에 의해 우리부에서 조경분야 자문위원 추천으로 진행하고 있음.

붙임: 1. 조경분야 설계변경소위원회 자문위원 명단 1부(별송)

2. 업무지시전 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	정영미		조경시설과장	신용우		방재시설부장	08/28 이임섭
협조자
시행	방재시설부-12816	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 (무교동)	/
전화	3708 - 8796	/전송	3708 - 8756	/	young306@seoul.go.kr	/	부분공개(5)