문서번호	생태환경과-2107
결재일자	2019.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	생태환경과장	공원부장
장창수	최병언	08/28 김인숙

- 이촌한강공원 녹지 정비사업 -

공사현장 실정보고(2차)에 대한 검토보고

2019. 8

생태환경과

- 이촌한강공원 녹지 정비사업 -

공사현장 실정보고(2차)에 대한 검토보고

자연성 회복사업 효과를 제고하고 공원이용 활성화에 기여하고자 시행중인「이촌한강공원 녹지 정비사업」과 관련하여 서울시설공단의 공사현장 실정보고(2차)에 대하여 아래와 같이 검토하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 이촌한강공원 녹지 정비사업

○ 공사기간 : 2019. 6. 25 ~ 9. 22

○ 공사내용 : 벌개제근(갈대제거), 수목식재(풍년화 등), 초화류(물억새 등) 식재 등

○ 도 급 비 : 금268,483,000원(관급자재비 291,816,000원 별도)

○ 도 급 자 : 청풍건설(주) 대표 박정일

▢ 실정보고 및 승인여부

구 분	변경사유 및 변경내용	승인여부
식 재 및 기반공사	○ 실설치 물량으로 변경	승 인
	▸ 꽃그령(8㎝): 4,870본 → 4,791본
	▸ 원추리(식물매트): 130㎡ → 128㎡
	▸ 은사초(식물매트): 40㎡ → 36㎡
	▸ 구절초(식물매트): 160㎡ → 156㎡
	▸ 콘크리트경계석(120×120×1000): 498m → 494m
	▸ 쇄석포장A(T200): 713㎡ → 717㎡
관급자재	○ 실납품 물량으로 변경	승 인
	▸ 원추리(식물매트): 787장 → 775장
	▸ 은사초(식물매트): 242장 → 218장
	▸ 구절초(식물매트): 969장 → 945장
부 대 공	○ 실 사용량으로 변경	승 인
	▸ 보행안전도우미(1일, 1인): 30인 → 20인

▢ 개략공사비

○ 도 급 액 : 감 1,726,000원

┏ 당   초 : 금268,483,000원

┕ 변   경 : 금266,757,000원

구 분		공 사 비(원)			비고
		당 초	변 경
총공사비		560,299,000	557,865,000	감 2,434,000
도 급 비	계	268,483,000	266,757,000	감 1,726,000
	공급가액	244,075,455	242,506,364	감 1,569,091
	부 가 세	24,407,545	24,250,636	감 156,909
관급자재		291,816,000	291,108,000	감 708,000

○ 관급자재비 : 감 708,000원

┏ 당   초 : 금291,816,000원

┕ 변   경 : 금291,108,000원

▢ 보고자 검토의견

○ 위와 같이 승인 통보하고 관급자재 물량 변경 및 설계변경 시행 등 공사시행에 철저를 기하고자 함.

붙임 : 1. 공사현장 실정보고 승인요청 공문 1부.

2. 공사현장 실정보고 검토보고서(서울시설공단) 1부.

3. 변경(개략)내역서 1부.  끝.