＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2019년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 “2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공사명: 2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

나. 도급자: 승효건설(주) 대표 김성현

다. 공사기간: 2019. 4. 26. ~ 2020. 4. 30.

라. 예산과목:

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(가압장 배수지 등)

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후밸브 정비)

- 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수, 시설비

마. 변경사유: 신규공정 및 계약물량 증·감 발생

바. 설계변경 내역(도급비): 변경없음

(단위: 원)

구 분	금 액		증·감	비고
	당 초	변 경
도 급 비	614,499,400	614,499,400	-	신규공종 발생 및 물량 증·감
공급가액	558,635,819	558,635,819	-
부 가 세	55,863,581	55,863,581	-

붙임  1) 설계변경 심의위원회 개최결과 보고 1부.

2) 설계변경 심의의견서 1부.

3) 설계변경 내역서, 변경사유서 1부.  끝.

주무관	한호진		시설관리과장	천성훈		동부수도사업소장	08/29 이구석
협조자
시행	시설관리과-20611	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	(02)3146-5157(강동)	/전송	(02)3146-5189	/	ddenda@seoul.go.kr	/	부분공개(7)