문서번호	거점성장추진단-1691
결재일자	2019.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	애니타운팀장	산업거점활성화반장		거점성장추진단장
박달님	김인호	정덕영		08/29 송호재
협 조

남산 애니타운 상징거리 조성 추진계획 변경

- 남산 애니타운 -

상징거리 조성 추진계획 변경

2019.  8.

경 제 정 책 실

(산업거점활성화반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

남산 애니타운 상징거리 조성 추진계획 변경

애니타운에 대한 서울역일대 도시재생사업의 확대와 관련 그와 연계하여 추진 중인 애니타운 상징거리 조성 계획을 변경하여 추진하고자 함

□ 사업개요(당초계획)

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

○ 대상지역 : 애니타운지역 재미로 일대 주요가로

- 퇴계로14길, 퇴계로16길, 퇴계로18길, 퇴계로20길(재미로) 및 골목길

○ 사업내용 : 재미로 가로환경 개선 및 애니타운 상징거리 조성

- 재미로 보‧차도 분리, 가변형 광장 조성 등 가로환경 개선(도시재생사업)

- 도로, 상가 등 시설물에 만화‧애니 디자인‧캐릭터 조형물‧조명 등 설치

○ 총사업비 : 20억 원(시 8억 원, SBA 12억 원[’19~’22 매년 3억 원])

※ 시 8억 원은 서울역일대 도시재생사업 ’19년 추경예산(도시재생실)

□ 추진경위

○ ’17. 7.27.	남산 애니타운 조성 5개년 계획(시장방침 제164호)

○ ’19. 1. 6.	애니타운 활성화 시장요청사항(재미랑6호 방문 시)

- 애니타운 상징거리 조성, 회현시민아파트 만화가 입주 지원 등

○ ’19. 2. 1.	애니타운(재미로 등) 활성화 추진방향 시장보고

○ ’19. 4.30.	시장님 재미랑 방문 관련 개선계획 시장보고

- 서울역일대 도시재생사업의 애니타운 가로환경개선과 연계 : 8억원

○ ’19. 4.30.	남산 애니타운 상징거리 조성 추진계획(실장방침)

○ ’19. 5.17.	남산 애니메이션 클러스터 관련 부시장 연석회의

○ ’19. 6. 3.	남산 애니메이션 클러스터 종합보고(시장)

- 서울역일대 도시재생사업의 애니타운 가로환경개선 확대 : 8억원 → 16억원

○ ’19. 8. 8.	애니타운 재미로 사업 협력계획(도시재생실장 방침)

- 애니타운 상징거리 조성사업과 융합을 위해 도로정비사업(16억 원) 추진

□ 계획 변경사유 및 방향

○ 당초 애니타운 상징거리 조성사업의 효과를 높이기 위해 재생사업과의 연계를 통해 재미로의 가로환경개선을 추진하였으나(’19년 8억원)

○ 1개 도로의 개선만으로는 애니타운의 상징거리 조성 사업효과가 제한적이어서 가로환경개선 재생사업 확대를 추진함(’19~’20년 16억원)

- 애니타운 재미로 사업 협력계획(’19.8.8. 도시재생실장 방침)

○ 또한 주요도로 이면부의 정비를 통해 거리가 애니타운의 플랫폼 역할을 할 수 있도록 애니타운 전체로 사업지역 확대가 필요함에 따라

- 주요사업은 도시재생실 계획대로 재미로 등의 가로환경개선에 집중

○ 상징거리 조성 추진계획의 변경을 통해 보다 종합적이고 체계적으로 애니타운의 도로 및 디자인을 개선하여 정체성을 강화하고자 함

□ 추진계획 변경

○ 사업비 변경 : 20억 원 ➡ 28억 원(가로환경개선 도시재생사업비 증액)

구 분		당 초	변 경
총사업비		20억 원	28억 원
’19~’20년	시(도시재생실)	8억 원(’19 8억)	16억 원(’19 8억, ’20 8억)
	SBA(출연금)	6억원(’19 3억, ’20 3억)	6억 원
’21~’22년	SBA(출연금)	6억원(’21 3억, ’22 3억)	6억 원

○ 사업지역 변경 : 가로환경개선 사업지역 확대, 연도별 사업지역 조정

구 분		당 초	변 경
’19~ ’20년	가로환경개선(중구)	재미로(퇴계로20길) 및 골목길	애니타운 (재미로, 퇴계로18길 및 연계도로 등)
	상징거리 조성(SBA)	재미로, 퇴계로20나길	재미로, 퇴계로18길(우선추진) 퇴계로14길,16길,20나길 등(병행추진)
’21~ ’22년	상징거리 조성(SBA)	퇴계로14길,16길 퇴계로18길

□ 연도별 추진계획

2019년		디자인 개발, 기본‧실시설계, 1단계 도로공사 시행

○ 애니타운 상징컬러, 디자인 개발(SBA) : ’19.7.~9.

- 애니타운 상징거리 조성을 위한 상징컬러, 디자인 기본방향 등

○ 주민 참여‧협력을 위한 애니타운 주민협의체 운영(SBA) : ’19.7.~

- 서울역일대 도시재생지원센터‧사회적협동조합의 주민협의체 지원사업과 협업

○ 애니타운 가로환경개선 기본‧실시설계 용역(중구) : ’19.9.~’20.3.

- 상징 디자인을 적용한 보도패턴 정비, 차도 포장 등 가로환경개선 설계

- 주요가로 및 시설별로 주제, 스토리텔링 계획 및 설계

※ 시 도시재생사업비 중구 재배정(8.19.), SBA와 협업하여 상징 디자인 반영

○ 재미로 등 1단계 가로환경개선 공사 시행(중구) : ’19.12.~’20.5.

- 색상‧패턴 도로포장, 가변형 광장, 지주사인, 벤치 등 공공시설 정비

2020년		가로별 애니 캐릭터‧조형물 등 설치, 2단계 도로공사 시행

○ 재미로, 퇴계로18길 등 상징거리 조성 시행(SBA) : ’20.1.~12.

- 가로별‧시설별 주제 및 스토리텔링 설계를 반영하여 상징거리 조성

- 도로‧상가 등 시설물에 상징 컬러‧캐릭터, 조형물, 전시공간 등 설치

※ 재미로, 퇴계로18길 외 건물주 등과 협의가 완료되는 다른 도로 병행 추진

○ 퇴계로18길 등 2단계 가로환경개선 공사 시행(중구) : ’20.6.~10.

- 색상‧패턴 도로포장, 가변형 광장, 지주사인, 벤치 등 공공시설 정비

2021~2022년		가로별 애니 캐릭터‧조형물 등 설치

○ 퇴계로14길‧16길‧20나길 등 상징거리 조성 시행(SBA) : ’21.~’22.

- 가로별‧시설별 주제 및 스토리텔링 설계를 반영하여 상징거리 조성

- 도로‧상가 등 시설물에 상징 컬러‧캐릭터, 조형물, 전시공간 등 설치

※ 건물주 등과 협의가 완료되는 다른 도로 병행 추진

□ 사업지역 위치도

재미로(퇴계로20길)

퇴계로18길

퇴계로14길,16길

퇴계로20나길

□ 행정사항

○ 산업거점활성화반	: 상징거리 조성 및 가로환경개선 사업관리

○ 공공재생과	: ’19~’20 도시재생사업 예산 편성‧배정

○ 중구(도심재생과, 도로시설과) : 사업 시행(기본‧실시설계, 공사)

○ SBA(콘텐츠산업본부)	: 상징거리 조성, 주민협의체 운영