문서번호	기전과-8430
결재일자	2019.8.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김흥식		08/29 서승완
협조

기전과 사무실 확장 건축공사

설계변경(정산) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 08.

강서도로사업소

(기전과)

기전과 사무실 확장 건축공사

설계변경(정산) 보고

『기전과 사무실 확장 건축공사』에 대한 공사물량 변경 및 보험료 정산 등 설계변경(정산)을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

◯ 공 사 명 : 기전과 사무실 확장 건축공사

◯ 계약금액 : 53,392,980원

◯ 공사내용 : 기전과 사무실 공간 확장(48㎡)

- 너비 12 × 세로 8 × 높이 3.5m

◯ 공사기간 : 2019.06.11. ~ 2019.08.16.

◯ 시공업체 : ************

□ 설계변경 사유

◯ 공사진행중 발생되는 계약물량 변경사항(증/감) 반영

◯ 주요 물량변경 추가공사

- 가설 가림막 설치 : 공사먼지유입방지, 공사중 사무환경 유지

- 창문 추가설치(이중문 설치) 등: 폭염 및 한파로부터 냉·난방 유지 등

- 내부 칸막이 추가 : 기존벽면 철거중 H빔에 턴버클이 발견되어 건물 안전을 위하여 턴버클을 보전하기 위해 마감칸막이 설치

- 기타사항 : 사무실 환경에 적합한 4way에어컨 설치비추가, 대형tv사양 변경 재산정 등

◯ 법정보험료(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 등) 및

산업안전보건관리비 등 정산

◯ 현장 사진

공사중 사진	공사중 사진

□ 주요 변경사항

◯ 주요 계약물량 변경사항(증/감)

(단위:원)

물량 및 보험료	수량	단위	당 초	변 경	증/감
금속공사 (스틸점검구 제외)	1	식	2,814,774	*********	**********
창호공사 (이중문추가)			2,029,059	*********	***********
수장공사 (가림막,칸막이추가)			3,033,256	*********	***********
기타공사 (냉난방기 이설 및 재산정)			10,551,300	**********	*********
철거공사 (라디에이터등 철거 추가)			893,844	*********	*********
건강보험료	1	식	414,495	*	**********
연금보험료	1	식	577,470	*	**********
노인장기요양보험료	1	식	35,273	*	*********
환경보전비	1	식	192,553	*	**********

□ 설계변경(정산) 금액

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증/감
총공사비		53,392,980	**********	**********
도급액	공급가액	48,539,073	**********	***********
	부가가치세	4,853,907	*********	*********
	계	53,392,980	**********	***********

▶ 예산과목 : 안전총괄실 도로관리과(강서도로사업소 관리단속과),

도로관리(6개도로사업소), 사업소 환경개선, 도로사업소

사무환경개선, 시설비

□ 보고자 의견

◯ 상기와 같이 공사 계약물량 변경사항(증/감) 반영 및 법정보험료

및 산업안전보건관리비 등을 정산하는 사항으로, 설계변경(정산)

내역에 적정하게 반영되었다고 사료되기에 설계변경(정산)을 시행

하고자 합니다.

붙임   1. 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.