투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	산출내역 변경에 따른 계약금액 변경요청(건명 : 잠수교북단 지하보도 CCTV 교체 전기공사)

우리 사업소에서 시행한 “잠수교북단 지하보도 CCTV 교체 전기공사” 건의 준공처리에 앞서 산출내역에 대한 변경을 실시하고 그 내역을 붙임과 같이 송부하여 드리오니, 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 잠수교북단 지하보도 CCTV 교체 전기공사

나. 계약 기간 : 2019. 7. 3. ~ 2019. 9. 5.

다. 계약상대자 : ********************

라. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 · 감
총 공 사 비	**********	**********	**************

마. 변경 내용 : 제경비 감액 (보험료 및 산업안전보건관리비)

바. 예산 과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 터널 및 지하차도 보행로 CCTV 개선, 시설비

붙임  1. 산출내역 제경비 감액처리보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	김성균		주무관	代김성균		기전과장	08/29 서수일
협조자	주무관	장재영
시행	기전과-9470	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 기전과 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8394	/전송	02-300-8410	/		/	부분공개(7)