“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약(세부내역 변경) 의뢰

1. 동북권사업단-8500호(2019. 8. 28.)와 관련입니다.

2.『창동·상계 동서간 연결교량 건설 설계공모관리 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경으로 인한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 창동·상계 동서간 연결교량 건설 설계공모관리 용역

나. 용역기간 : ‘19. 4. 3. ~ ‘19. 8.30.

다. 계 약 자 : 이지클린 대표 권희경

라. 계약금액 : 금오천구백구십삼만삼천오백원(￦59,933,500원)

마. 변경내용

1) 설계변경 내역

구 분	계 약 금 액		비 고 (증·감)
	당 초	변 경
창동·상계 동서간 연결교량 건설 설계공모관리 용역	59,933,500원	59,933,500원	증·감사항 없음

2) 변경사유 : 세부내역 변경 (총계약금액 변경 없음)

· 심사진행비(증 727,361원), 통신비및잡비(증 84,039원), 시상비(증 544,600원), 위원수당(감 1,356,000원)

바. 예산과목 : 지역발전본부 동북권사업과, 도시경제기반형 활성화계획 추진, 창동·상계 신경제중심지 조성, 창동·상계 동서간 연결교량 건설사업, 시설비

붙임 : 1) 설계변경 검토보고 1부.
2) 변경설계서 1부.
3) 합의각서(변경) 1부.  끝.

	동북권사업과장
주무관	황인태		발전기획팀장	오대중		동북권사업과장	08/29 오장환
협조자
시행	동북권사업과-8526	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스 5층	/
전화	02-2133-8279	/전송	02-2133-0740	/	civil70@seoul.go.kr	/	대시민공개