국회의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-16427
결재일자	2019.8.30.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		철도계획팀장	교통정책과장	교통기획관	도시교통실장	결재
신상형		이기웅	구종원	임동국	08/30 황보연
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1589번, 김성태의원, 행정안전위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

*********************

[요구번호 : 1589번]

2. 5호선 방화차량기지 이전 추진현황 및 향후 추진계획

7. 원종~홍대 서부광역철도 추진현황 및 향후계획

의원님이 요구하신 방화차량기지 이전 및 원종홍대선 추진현황 등을 아래와 같이 제출합니다.

2. 5호선 방화차량기지 이전 추진현황 및 향후 추진계획

□ 추진 현황

○ ’17.03. : 5호선 방화차량기지 이전 사전타당성용역 착수 (시)

○ ’17.06. : 5호선 김포(검단), 고양 연장 건의(경기도의회 등)

○ ’18.01. : 김포시, 인천시, 고양시 협의(차량기지만 이전 수용)

○ ’18.06. : 5호선 방화차량기지 이전 사전타당성용역 완료 (시)

- 차량기지와 건폐장 동시 이전시 경제적타당성 높게 분석됨 (김포연장 B/C 0.69/0.81)

○ ’18. 7.~9.  : 용역결과에 따른 사업추진방안 관계기관 협의 (시↔관계지자체)

- 차량기지 이전 수용, 건폐장 이전 수용 불가 (김포,고양,경기도)

- 차량기지 개발이익 전액 건설비, 운영비로 사용 (김포,고양,인천,경기도)

○ ’18.11.   : 5호선 김포연장 MOU(안) 협의 (홍철호(김포)의원 제안)

- 건폐장 수도권매립지 인근지역 이전, 5호선 김포 연장 ⇒ 인천서구 반대

○ ’18.12.19 : 수도권 광역교통망 개선방안 발표 (국토부)

- 한강선(가칭) 발표 (24.2㎞, 방화~김포)

○ ’18.12.21 : 관계기관 회의 (서울시,경기도,인천시,김포시,고양시)

- 건폐장 이전 수용 곤란 (경기,김포,고양)

□ 향후 추진 계획

○「5호선 방화차량기지 이전 사전타당성 조사용역(‘17.3~’18.6)」결과, 5호선 연장(김포방향) 사업은 경제적타당성 확보를 위해서는 방화차량기지 및 방화건폐장 동시이전이 필요한 것으로 분석됨 (김포 장기연장, B/C 0.81)

○ 김포시 등 관계기관과 사업추진 방안에 대하여 협의한 결과 방화차량기지 이전은 수용가능하나, 방화건폐장시설 이전은 수용불가 입장임

○ 이에 우리시는 5호선연장(김포방향) 사업 추진 방안에 대하여 하반기 중 경기도 등 관계기관과 재 협의할 계획이며, 아울러 경기도 등에서 5호선연장(김포방향) 사업타당성 확보 방안을 제시할 경우 적극 검토하여 국토부에 사업 추진을 건의할 계획임.

7. 원종~홍대 서부광역철도 추진현황 및 향후계획

□ 추진 현황

○ ’13. 6 : 10개년 도시철도기본계획 재정비 용역완료 (서울시)

노선명	구 간	규 모	사업비(억원)	B/C	비고
화곡∼홍대 입구선	화곡∼DMC	8.98㎞	7,560	0.78
	화곡~홍대입구	11.79㎞	10,206	0.81	후보노선 선정

○ ’13.12.~’14.11. : 3개 지자체 공동용역 (강서구, 마포구, 부천시)

- 부천 원종~홍대입구 / 17.2㎞ / B/C 1.01/신정기지 공동사용

○ ’16. 6.27	: 제3차 국가철도망 구축계획 결정고시 (국토부)

- 원종홍대선 반영, 신정지선 연장은 도시철도로 추진

○ ’16.10.~’17.3 : 신정차량기지 활용 가능 사전 타당성조사 용역시행

- 신정차량기지 유치용량 부족으로 사업추진 곤란, 차량기지 신설 등 대안 마련필요

○ ’18. 4.26 : 원종홍대선 사전타당성조사 용역 착수

- 과업기간 : ‘18.4.26~’19.2.19, 계약금액 303백만원

○ ‘18.7. 5 : 서울2호선 청라국제도시 연장 관련 협조 요청(인천시→서울시))

- 원종홍대선 사전타당성조사 용역에 추가과업으로 청라국제도시 연장 검토

○ ‘18.11.26 : 용역 변경 계약

- 2호선 청라국제도시 연장 과업추가 (추가용역비 424백만원 인천시 부담)

- 과업기간 : ‘18.4.26~’19.2.19 ⇒ ‘18.4.26~’19.5.20

○ ‘19. 1.30 : 서부지역광역철도 건설특별위원회 개최(서울시의회)

○ ‘19. 3. 5  : 원종홍대선 차량기지 관련 관계기관 실무 회의

- 서울시, 강서구, 마포구, 양천구, 경기도, 인천시, 부천시

	※차량기지 관련 기관별 입장
□ 부천시, 강서구 : 전용차량기지 수용, 통합차량기지(신정기지 이전) 수용 곤란 □ 양천구 : 지역민원 고려 신정기지 이전 필요 □ 마포구 : 성산역 추가 신설 필요

○ ‘19. 5.20  : 용역 준공기한 연기

- 과업기간 : ‘18.4.26~’19.5.20 ⇒ ‘18.4.26~’19.12.6

○ ‘19. 8. 현재  : 용역 시행 중

□ 향후 추진계획

○ ’19. 12.   :	용역 준공

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교통정책과)	담당사무관	이기웅
	☎2133-2238	주무관	신상형
	작 성 일 : 2019. 8.

이곳에 본문을 입력하세요