문서번호	행정지원과-22655
결재일자	2019.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		중부수도사업소장
이지은	은정호	장성만		08/30 代장성만
협 조	요금과장		최성길
	주무관		고성배

세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!

검침원 휴게공간 신규 설치 계획

2019. 8.

중부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

검침원 휴게공간 신규 설치 계획

우리 사업소의 열악한 사무공간을 할애하여 검침원 남자 휴게실을 설치하여, 함께 일하는 직원들의 근무의욕을 높이고자 함.

□ 추진 근거

○ 검침원 사무환경 조사결과 보고(요금제도과-본부장 보고, 2019.8.7.)

□ 추진 배경

○ 청사 내 사무공간이 협소하여 시설 관리공단 직원(남자 검침원)의

휴게 공간이 없어 사업소 공무원과 비교, 상대적인 불만이 있었는데,

○ 금 번 본부장님 당부사항에 따라 문서고 일부를 정리하여 남자 직원       휴게실로 활용키로 함.

□ 검침원 근무현황

○ 근무인원 : 47명(남 31, 여 16)

○ 사무공간 : 청사 1층, 81㎡ (1인당 1.72㎡)

○ 휴게공간 : 여자 검침원 휴게공간은 기 설치, 15.0㎡(2018.8.24.)

사무실	여자 휴게실

□ 남자 휴게실 설치 방안

○ 위    치 : 사업소 본관 지하 1층 요금․급수․시설과 문서고 내

- 휴게실 위치는 검침사무실과 기 협의 완료 : 2019.8.8.(목)

○ 설치면적 : 12.49㎡

○ 공사기간 : 2019.9.2. ~ 9.6.

○ 소요예산 : 3,000천원(청사 시설유지관리비 활용)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지비, 수선유지교체비(99202)

○ 공사내용 : 문서고 정리 및 물품이동, 철제문 재설치, 도배, 난방시설

○ 현장 사진

입 구	외 부	내 부

※ 건물의 주 출입문 쪽에서는 지하에 해당하나 건물 외부에서는 지상2층에 위치

□ 행정 사항

○ 문서고 정리 및 물품이동(요금․급수운영․시설관리과) : ~ 2019.9.3.

- 불필요한 물품은 관리전환 및 불용 처분

○ 공사 담당 및 예산 집행(*********) : ~ 2019.9.8.

- 철제문 재설치, 도배(페인트), 난방시설 등

○ 에어컨 등 필요물품 구비(서울시설공단) : ~ 2019.9.20.

○ 휴게 공간 청결 및 안전관리(요금과, 서울시설공단) : 2019.9.7. ~ (계속)