투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	노들섬특화공간 조성공사 책임건설사업관리기술자 귀하
(경유)
제목	『노들섬 특화공간 조성공사』하단부 경관개선 실정보고 승인 및 업무지시

1. 유탑노들 제19-900(2019.08.16)호와 관련입니다.

2.『노들섬 특화공간 조성공사』하단부 경관개선 실정보고에 대하여 따로 붙임과 같이 승인하오니

변경과 관련된 도급비 증,감 사항은 조경공사 설계변경소위원회 심의를 받아, 그 결과를 반영

하시고

3. 2019.9.28.(토) 예정된 노들섬 개장행사에 차질이 없도록 관련 공정추진에 철저를 기하여

주시기 바랍니다.

가. 하단부 계단설치, 동측 비오톱구간 관리데크, 하단부 크랙가든 및 서측 초화원 조성

나. 상단부 수목 및 초화류 보완식재, 식재수목 유지관리(급수 및 고사목 교체) 등

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 주관부서 요청공문 1부.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							김달용			조경시설과장					신용우					방재시설부장					전결 08/30 이임섭
협조자
시행			방재시설부-12996									(						)		접수											(						)
우	04520					서울 중구 청계천로8 (무교동96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		3708-8792						/전송			3708-8756					/	kdyong4992@seoul.go.kr												/	부분공개(5)