문서번호	시설보수과-4816
결재일자	2019.8.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이생기		임준빈	08/30 이성재
협조
	주무관		이석근

『제3처리장 침전지 D열 보수공사』

준공기한 연기보고

2019. 08.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 침전지 D열 보수공사 준공기한 연기보고

우리 센터에서 추진하고 있는 “제3처리장 침전지 D열 보수공사“ 에 대하여 감독청인 시설관리공단에서 준공기한 연기 요청 보고에 대하여 아래와 같이 보고함.(공사감독2처-12021호(2019.8.29.))

1		용역개요

가. 공 사 명 : 제3처리장 침전지(D열) 보수공사

나. 공사기간 : 2019.01.07 ~ 2019.09.21

**************************

라. 공사개요 : *********************

**********************

마. 도 급 자 : ****************

바. 감 독 청 : 서울시설관리공단

2		공단 보고내용

가. 공정현황

1) 공정율 : 85% 【2019.08.29.기준】

2) 작업완료사항 : 표면보수(ECON) 9,356.1㎡, 단면보수(KRCD) 1,899.0㎡

3) 잔여작업사항 : 단면보수(KRCD) 759.6㎡

나. 준공기한 연기 사유

○ 추가 작업지시에 의한 공기 연장 필요

- 당초 : 6개소 + 부분보수 1개소 → 변경 : 7개소

- 부분보수 1개소(7지)를  전체보수로 변경

○ 추가 소요일수 : 28일

공 종	작업일수 산정						계
	퇴수 및 내부 물청소	비계설치	치핑	미장	내부청소 및 비계해체	정리 및 물채우기
소요일수	8	3	4	4	5	4	28

- 작업지시에 따라 9지를 추가 시행하고자 하나, 9지(반류수처리 시설)          의 경우1~8지(하수처리 시설)보다 부유물이 많고 유해가스가 측정          되어 충분히 환기시킨 후 작업을 시행해야 하는 실정이며

- 추가적으로 내부 물청소 작업이 필요하여 작업일수가 1~8지(하수      처리 시설) 보다 증가됨.

- 내부 물청소 반영 및 공종별 소요일 수 산정결과 총 28일이 소요됨

2) 준공기한 연기 요청일

************************************

************************************

다. 공단 검토의견

1) 작업지시(시설보수과-3446, 2019.06.20.)에 따른 작업일수 증가로 추가

소요일 수 만큼 준공기한을 연기하여 품질확보 및 공정관리에 만전을

기하는 것이 타당하다고 판단됨.

3		사업소 검토의견

가.  위 공단의 검토의견과 같이 추가작업지시 및 9지(반류수 처리시설)의        경우 부유물이 많고 유해가스가 측정되어 충분히 환기시킨후 작업을        시행 및  추가적인 물청소 작업이 필요하여 작업일수가 증가되어 준공

기한을 연기하여 밀폐된 공간에서의 안전사고 예방 및 품질 확보 및        공정관리에 만전을 기함이 타당하다고 판단됨.

4		조치의견

가.  위와 같은 준공연기보고 요청에 대해 검토한 내용을 시설공단에 통보 하고자        함.   끝.