설계변경(2차-최종) 심의 의결서

공사명: 한남테니스장~청구역간 송배수관정비공사

의 뢰 부서명	중부수도사업소 급수운영과
공사 담당	지방시설주사보 안윤자
검토 의뢰일시	2019. 8. 30.

검 토 의 견 서

○ 공 사 명: 한남테니스장~청구역간 송배수관정비공사

○ 검토일시: 2019.8.30.

○ 심의(검토)내역

- 신규공종 산출 적정성 여부

- 물량 변동의 적정성 여부

- 관련 규정 및 적법성 여부

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

채재일

08/30

채재일

적정함

위    원

시설관리팀장

김종수

이유찬

적정함

위    원

주무관

유세종

유세종

적정함

위    원

급수설비팀장

박장진

박장진

적정함

위    원

주무관

이훈재

이훈재

적정함

담    당

주무관

안윤자

안윤자

설계변경(2차-최종) 사유서

1. 공사현황

가. 공 사 명: 한남테니스장~청구역간 송배수관정비공사

나. 공사개요: D = 13 ~ 700mm, L = 1,408m

다. 공사기간: 2018.04.27. ~ 2019.09.02.

*************************

************************

2. 설계변경 금액

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
도급비	공급가액	1,883,985,091원	1,690,800,000원	감)193,185,091원
	부가세	188,398,509원	169,080,000원	감) 19,318,509원
	계	2,072,383,600원	1,859,880,000원	감)212,503,600원
공사개요		D13~700mm, L=1,460m	D100~700mm, L=1,338m	감)122m

3. 설계변경 사유

가. 공사현장과 설계서 상이로 인한 변경

나. 발주청 지시로 인한 변경

다. 공종별 변경내역: 각 공종별 실시공 수량 정산

공 종	주요내용	증·감	비 고
토 공	**************** ************	***********
부 설 공	**************** **************** *******************	************
구조물공	**********	***********
부 대 공	**************	***********
포 장 공	*******************	***********
사급자재비	*******************	***********
제비율 외	******************	**********
보험료 등	*************	************

4. 조치계획

가. 설계변경 심의위원회에서 의결한 내용을 반영하여 변경계약 시행코자 합니다.

붙임   설계변경 내역서 1부.

방침서 1부. 끝.