문서번호	치수과-12033
결재일자	2019.8.30.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
김재혁		백원기		민병기		08/30 손경철
협조
	재무과장		홍명안
	계약팀장		양영종

★ ◉

「2019년 관내 하수시설물 유지보수공사(단가계약)」

설계변경(제2회) 검토보고

2019. 8.

성   동   구

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 시비 재배정사업 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「2019년 관내 하수시설물 유지보수공사(단가계약)」

설계변경(제2회) 검토 보고

우리구에서 시행중인 『2019년 관내 하수시설물 유지보수공사(단가계약)』 의 시공 물량 증·감 등에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 함.

Ⅰ		사업현황

○ 사 업 명: 2019년 관내 하수시설물 유지보수공사(단가계약)

○ 사업기간: 2019. 2. 27. ~ 2019. 12. 31.

○ 공사개요: 하수관로 개량 L=678m, 맨홀 정비 30개소, 빗물받이 정비 196개소 등

○ 도 급 자: 금원종합건설(주) (대표 박주범)

○ 도 급 비: 871,000,000원

Ⅱ		설계변경 사유

○ 하수 관련 민원조치 및 현장여건 변경에 따른 물량 증감

○ 도로함몰 예방 노후 하수관로 조사불가 구간 맨홀정비 물량 증가

- 사업비 80백만원(시비), 치수과-9046호(2019. 7. 4.)

○ 골목자치 활성화사업 관련 사유 골목길(현황도로) 공공하수관 부설에 따른 물량 증가

- 사업비 12백만원(구비), 치수과-7130호(2019. 5. 27.)

○ 물량 증․감 내역

공 종		단위	수 량				비고
			당 초	변 경	증 ․ 감
토 공	터파기	㎥	680	1,024		344
	되메우기 및 다짐	㎥	486	729		243
	아스팔트 포장 절단	m	1,415	1,505		90
	아스팔트 깨기	㎥	9	9		0
	콘크리트 깨기	㎥	128	139		11
배수공	경계측구 설치	m	186	261		75
	하수관 신설 및 개량	m	678	768		90
	맨홀설치 및 개량	개	28	36		8
	빗물받이 설치 및 개량	개	195	241		46
포장공	소형고압블럭 걷기 및 포장	a	7.5	10.7		3.2
	아스콘 포장	a	21	30.5		9.5
	콘크리트 포장	a	8	9.4		1.4
부대공	차선도색	m	121	286		165
	물돌리기	hr	224	224		0

Ⅲ		설계변경 내역

○ 공사금액 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	1,209,900,000	1,301,900,000	증 92,000,000
도 급 비	871,000,000	1,060,716,000	증 189,716,300
관 급 비	108,380,000	109,670,000	증 1,290,000
이 전 비	230,520,000	131,514,000	감 99,006,000

Ⅳ		조치의견

○ 상기 내용과 같이 시공방법 및 물량 증·감 등에 대하여 설계변경 시행하고자 함.

붙  임: 변경설계서 1부.