투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(돈화문 민요박물관 건립 기계공사 2차 및 총차)

1. 설비부-13318호(2019.08.29.)와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행중인 「돈화문 민요박물관 건립 기계공사 2차」에 대하여 설계변경 및 준공(정산)이 발생하여 아래와 같이 변경계약 의뢰 하오니 조치하여주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 돈화문 민요박물관 건립 기계공사 2차

나. 공사기간 : 2019.08.01. ~ 2019.08.31.(2차) ※ 변동사항 없음

2018.01.10. ~ 2019.07.31.(1차)

(단위:원)

구 분	계약금액	준공(정산)금액	증감	비고
총 차	502,737,000	497,051,500	-5,685,500
2 차	320,237,000	314,551,500	-5,685,500

다. 예산과목

- 문화본부 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 돈화문 전통문화시설 건립, 시설비

라. 설계변경 사유

- 상설전시장 천장방식 변경(메시방식→오픈천장방식)에 따른 소화설비(스프링클러) 설치방식 변경

붙임  1. 설계변경 및 준공(정산) 보고서 1부.

2. 건설사업관리단 검토보고서(합의각서 및 증빙서류 포함) 1부.

3. 기계공사 내역서(2차 및 총차) 각 1부.

4. 검증확인서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	마권택		건축설비과장	代백남진		설비부장	08/30 代여인웅
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-13391	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 물재생시설과 (서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-2133-3844	/전송	02-2133-1043	/	whycut@seoul.go.kr	/	부분공개(5)