문서번호	교량안전과-15081
결재일자	2019.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량관리팀장	교량안전과장
신익현	代신익현	08/31 김종호

-「한강교량 보수보강공사」건설사업관리용역」-

설계변경 검토보고(총괄4회, 3차1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8월

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

-「한강교량 보수보강공사」건설사업관리용역」-

투입계획 변경에 따른 계약조정 검토보고(총괄4회, 3차1회)

『 한강교량 보수․보강공사 건설사업관리용역 』에 대한 투입기간 변경 및 등급 조정 등을 반영한 설계변경 요청에 대한 검토 보고임.

※ 건설사업관리용역 설계변경 승인요청(동성감리 제2019-666호, 2019.8.23)

1		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 한강교량 보수․보강공사 건설사업관리용역(장기계속)

○ 용 역 사 : ㈜동성엔지니어링 외 2개사

○ 계약현황

(단위:천원)

구분	계약일	계약기간	계약금액	비 고
총 괄	2017.01.05	2017.01.05 ~ 2019.12.31	*********	시 행 중
1 차	2017.01.05	2017.01.05 ~ 2017.12.31	*******	용역준공
2 차	2018.01.01	2018.01.01. ~ 2018.12.31	*******	용역준공
3 차	2019.02.08	2019.02.08. ~ 2019.12.31	*******	시 행 중
잔 여	-	-	-	-

2		검 토 내 용

계약금액 변경

○ 계약금액 조정(총괄 및 3차)

구 분	당 초	변 경	비 고
총괄	*********	*********	변경없음
3차	*******	*******	변경없음

○ 계약기간 변경(총괄 및 3차)

구 분	당 초	변 경	비 고
총괄	‘17.1.5.~´19.12.31 (36개월)	‘17.1.5.~´19.12.31 (36개월)	변경없음
3차	‘19.2.8.~´19.12.31 (11개월)	‘19.2.8.~´19.12.31 (11개월)	변경없음

건설사업관리기술자 투입계획 조정현황

○ 조정현황

구 분		당 초	변 경	비 고
책임기술자	1차	2017.01.05 ∼ 2017.12.31	2017.01.05 ∼ 2017.12.31
	2차	2018.01.05 ∼ 2018.12.31	2018.01.05 ∼ 2018.12.31
	3차	2019.01.01 ∼ 2019.12.31	2019.02.08 ∼ 2019.12.31	기간변경
분야별기술자(고급)	1차	2017.03.16 ∼ 2017.12.31	2017.03.16 ∼ 2017.12.31
	2차	2018.09.03 ∼ 2018.12.03	2018.09.03 ∼ 2018.12.03
	3차	2019.05.01 ∼ 2019.07.31	-	고급(토목) → 중급(도장)
분야별기술자(중급)	3차	-	2019.06.03 ∼ 2019.09.25
분야별기술자(중급)	1차	2017.01.05 ∼ 2017.12.31	2017.01.05 ∼ 2017.12.31
	2차	2018.01.05 ∼ 2018.01.31 2018.03.01 ∼ 2018.12.31	2018.01.05 ∼ 2018.01.31 2018.03.01 ∼ 2018.12.31
	3차	2019.01.01 ∼ 2019.01.31 2019.03.01 ∼ 2019.12.31	2019.02.08 ∼ 2019.12.31
분야별기술자(중급)	1차	2017.01.05 ∼ 2017.12.20	2017.01.05 ∼ 2017.12.20
	2차	2018.02.01 ∼ 2018.12.31	2018.02.01 ∼ 2018.12.31
	3차	2019.02.01 ∼ 2019.12.31	2019.03.04 ∼ 2019.12.31
분야별기술자(중급)	1차	2017.05.15 ∼ 2017.11.15	2017.05.15 ∼ 2017.11.15
	2차	2018.05.08 ∼ 2018.12.10	2018.05.08 ∼ 2018.12.10
	3차	2019.06.01 ∼ 2019.10.27	2019.05.09 ∼ 2019.12.13
분야별기술자(중급)	1차	2017.04.05 ∼ 2017.12.15	2017.04.05 ∼ 2017.12.15
	2차	2018.06.20 ∼ 2018.12.24	2018.06.20 ∼ 2018.12.24
	3차	2019.06.01 ∼ 2019.12.22	2019.05.09 ∼ 2019.12.24

○ 변경사유

- 건설사업관리용역 계약의(3차) 기술자 투입기간 및 등급 조정

검 토 결 과

○ 계약금액 및 기간   : 변경없음

○ 등급조정 결과 반영 : 3차용역, 고급(토목)→중급(도장)

○ 투입기간 조정 반영 : 분야별기술자 실투입 기간으로 변경

3		조 치 계 획

❍ 효율적인 업무 수행을 위하여 상기 검토내용과 같이 용역 변경계약토록 조치하고자 합니다.

- 변경내용

구 분		당 초	변 경	비 고
총괄 (4회)	금액	*********	*********	변경없음
	기간	‘17.1.5.~´19.12.31 (36개월)	‘17.1.5.~´19.12.31 (36개월)	변경없음
3차 (1회)	금액	*******	*******	변경없음
	기간	‘19.2.8.~´19.12.31 (11개월)	‘19.2.8.~´19.12.31 (11개월)	변경없음

붙임 : 1. 관련공문(건설사업관리용역 설계변경 승인요청) 1부

2. 설계변경 내역서(총괄4회)

3. 설계변경 내역서(3차1회).  끝.